보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이상욱	유명은	10/31 김정수

제 목 : 급수공사 실정보고 (공사연기)

=============================================================

명에 의하여 급수공사 업무수행 중 급수공사 연기요청이 있어 아래와 같이 보고 드림

□ 급수공사 개요

계약명	작업지시 번호	위 치	공 사 개 요
2017년 목1동외 17개동 상수도공사	개량-67	**********	폐전 D = 50mm

□ 실정내용

○ 자재적치 등 공사연기

- 현장에 자재적치로 인하여 굴착이 불가하여 공사기한 내 급수공사 완료가 부득이 어려운 실정임

- 공사 예정일 : 2017. 11월 하순

□ 조치계획

○ 공사기한 연기조치	시행

작업지시번호	공사기한 변경		비 고
	당초	변경
개량-67	2017. 10. 19.~2017. 10. 30.	2017. 10. 19.~2017. 11. 30.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 현장실정보고 1부.  끝.