아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	(주)동성엔지니어링 책임건설사업관리기술자 이용성 님
(경유)
제목	준공기간 연장승인 알림(한남대교 보수공사)

1. 동성한강2017-352호(2017.10.26)호와 관련입니다.

2.  우리시와 계약 체결하여 시행중인 「한남대교 보수공사」와 관련하여 준공기간 연장   요청 사항에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니, 재무과에 변경계약 체결 하시기 바라며, 아울러 시설물의 품질확보와 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기간 변경승인 사항

공 사 명	공사기간
	당 초	변 경
한남대교 보수공사	2017.05.11.~2017.11.06	2017.05.11.~2017.12.20

. 끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	김태형		강구조교량팀장	정회평		교량안전과장	10/31 한유석
협조자
시행	교량안전과-19585	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 1동 2층	/
전화	02-2133-1964	/전송	02-2133-1429	/		/	대시민공개