	서울특별시교통방송
수신자	기술국장
(경유)
제 목	변경계약 체결통보 [tbs 교통방송 방송프라자 구축]

1. 기술국-8337(2017. 9. 27.)호와 관련입니다.

2.「tbs 교통방송 방송프라자 구축」건에 대하여 아래와 같이 변경계약체결 결과를 알려드리니 업무추진에 참고하시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : tbs 교통방송 방송프라자 구축

나. 계약변경일 : 2017. 9. 29.

다. 변 경 내 역

	세부납품내역	계약기간
변 경 전	·전광판 모듈 1식	2017.05.15.~2017.10.13.
변 경 후	· SYNC GENERATOR 1EA · HD Modulator 2EA	2017.05.15.~2017.12.31.

붙임 : 1. 변경계약서 1부.  끝.

	기획조정실장
주무관	김혜자		재무팀장	이계홍		경영지원부장	이준연		기획조정실장	10/31 남길순
협조자
시행	기획조정실-13294	(		)	접수		(		)
우			/	http://tbs.seoul.kr
전화	02-311-5233	/전송	02-311-5229	/	tt1211@seoul.go.kr	/	부분공개(5)