문서번호	급수운영과-19646
결재일자	2017.11.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박홍		11/01 박희철
협 조
	주무관			김생수
	주무관			이승우
	주무관			代김일구
	주무관			이생기

설계변경 심의 의견서

(*********************)

2017. 11.

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 의견서

❍ 공 사 명 : *********************

신청부서명	급수운영과
작 성 자	주무관 박 홍
심의일시	2017. 11. 01.(수)

❍ 심의위원회 의견

- 심의일시 : ‘17. 11. 01.(수) 10:00~10:30

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과를 아래와 같이 의견 제시함

구 분	직위	심의결과	성 명	비 고
위원장	급수운영과장	적정함	박 희 철
위 원	급수운영과 주무관	적정함	김 생 수
위 원	시설관리과 주무관	적정함	이 생 기
위 원	급수운영과 주무관	적정함	이 승 우
위 원	시설관리과 주무관	적정함	김 일 구

설계변경 요약 보고

공사현황

〇 공 사 명  : *********************

〇 공사개요  : 당초 – D=*****************

변경 – D=*****************

〇 도 급 비  : 당초 – ************

변경 – ****************************

〇 공사기간  : **************************.

〇 시 공 사  : ***************

〇 예산과목  : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

노후 상수도관(송배수관)정비-21102

설계변경사유

〇 실정보고 반영

- 공기밸브 추가시공 외 2건[공사감독2처-10217(2017.09.15.)]

· 2구간 공기밸브 추가 시공

· 2구간 라인스토핑 추가

- 분기밸브 추가 외 2건 [공사감독2처-12231(2017.10.25.)]

· 분기밸브 추가 시공(D80mm)

· 1구간 라인스토핑 추가

- 코너벽돌 변경시공[공사감독2처-12396(2017.10.26.)]

- 충진 작업구 설치 공법 변경 외 1건[공사감독2처-5233(2017.06.15.)]

· 충진 작업구 설치 공법 변경

· 충진 작업구 설치로 토공량 변경

〇 기타사항 반영

- 건강보험료, 노인장기요양보험료, 연금보험료, 퇴직공제부금 등 실 납부 금액으로 정산

주요공정 검토현황

구 분	검 토 내 용	검토결과	비고
1. 토공	아스팔트포장절단외 28공종	이상없음
2. 부설공	주름마디 스텐관 부설공(25mm)외 58공종	〃
3. 구조물공	원형밸브실 설치공(기초con)(80mm) 외 10공종	〃
4. 가시설공	토사천공(AUGER)-D400,토사층, 야간외 10공종	〃
5.기존관페쇄 충진공	기존관폐쇄 충진공(경량그라우트,야간)외 10공종	〃
6. 부대공	콘테이너 가설사무실외 36공종	〃
7. 기타 제잡비	적정한 제잡비 반영여부	〃

도급비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	공급가액	536,588,819	519,770,000	감 16,818,819
	부가가치세	53,658,881	51,977,000	감 1,681,881
	합 계	590,247,700	571,747,000	증 18,500,700

붙임  1. 설계변경 관련 서류 1부.

2. 제비율 검증 확인서 1부.  끝.