투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	동대문구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 준공기한 변경 승인

1. 교통행정과-37295호(2017.10.31.)와 관련입니다.

2. 「2017년 보호구역(어린이·노인) 정비사업 관련 교통안전시설물 원인자부담공사(노면표시)」 준공기간 변경요청에 대해 아래와 같이 승인하오니,

3. 「교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항」 및 「노면표시 시방서」 규정에 따라 공사를 시행하여 주시고 공사완료 후 T-GIS시스템 입력 및 준공확인을 요청하시기 바랍니다.

가. 승인기간 연장

공 사 명		2017년 보호구역(어린이·노인) 교통안전시설물 원인자부담공사(노면표시)	비 고
공사기간	당 초	2017.09.08.~ 2017.10.30.	공사관리번호 ************* *************
	변 경	2017.09.08.~ 2017.11.13.
변경(연기)사유		준공검사시 보완사항 처리

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	민병훈		도로보수과장	11/01 이상호
협조자
시행	도로보수과-5519	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동)	/
전화	02-2210-1538	/전송	02-2210-1549	/		/	부분공개(5)