투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	용역 계약변경 의뢰(난지안내센터 신축 설계용역)

우리본부에서 추진중인 「난지안내센터 신축」 설계용역에 대하여 아래와 같이 계약변경 하고자 합니다.

가. 계약변경 내용

(단위 :천원)

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약금액	84,260	84,260	변경없음
용역기간	2017. 5. 17. ~ 2017. 11. 2.	2017. 5. 17. ~ 2017. 12.12.	증 40일

나. 변경사유 : 서울지방국토관리청 하천점용허가 지연기간 반영

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임  1. 계약변경 검토 보고서 1부.

2. 계약변경 의뢰서 1부.  끝.

주무관	남궁환		총무과장	11/01 박병현
협조자
시행	총무과-18087	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층	/
전화	02-3708-2629	/전송	02-3708-2659	/	nkh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)