투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	하도급 변경계약 알림_중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업(기계/전기)

「중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」관련 기계공사 하도급 변경계약 내용을 아래와 같이 알려드립니다.

가. 도급현황

(단위: 원)

하도급 공종명	원도급 업체명	하도급 업체명	하 도 급 공사기간	원도급액	하도금액	하도급 비 율	비 고 (원도급사 추가 부담)
기계설비공사	지에스건설㈜	해원산업㈜	’16.08.24. ~’17.08.31.	832,059,000	710,769,400	85.42%	1,980,270,600
전기설비공사	지에스건설㈜	금아기전㈜	’16.08.24. ~’17.08.31.	2,693,314,000	2,304,874,000	85.58%	962,016,000

나. 변경사항: 공사기간 변경(금액변동 없음)

하도급 공종명	원도급 업체명	하도급 업체명	공사기간 변경		변경사유	비고
			당초	변경
기계설비공사	지에스건설㈜	해원산업㈜	’16.08.24. ~’17.08.31.	’16.08.24. ~’17.12.31.	종합시운전 중단에 따른 시설 개선공사를 위한 공사기간 연장
전기설비공사	지에스건설㈜	금아기전㈜	’16.08.24. ~’17.08.31.	’16.08.24. ~’17.12.31.

붙임  하도급 계약 검토 보고(감리단) 1부.  끝.

	설비부장
수신자	건설총괄부장,방재시설부장
주무관	김인호		열빛총괄과장	유병기		설비부장	11/02 권오식
협조자	주무관	김두환
시행	설비부-18456	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	ijhw21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)