문서번호	정수과-6877
결재일자	2017.11.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
서홍교	11/02 하은경

기성대가 지급 검토 보고

(정수처리시설 청소 및 준설용역)

2017. 11

암사아리수정수센터

(정 수 과)

기성대가 지급 검토 보고

(정수처리시설 청소 및 준설용역)

정수처리시설 청소용역 업체에서 제출한 기성대가 지급요청 사항의 적정여부를 검토하고 그 결과를 보고드림.

□ 용역개요

○ 용역기간 : 2017.03.17. ~ 2017.12.22.

○ 용역업체 : 대동건설[대표 - 차동욱, 소재지 - 서울시 중랑구]

○ 청소물량 : 정수지 52,522㎡, 기타 303,080㎡, 준설 133㎥ 등

○ 용 역 비 : 금237,464,330원

○ 기성금액 : 금152,911,000원(64.4%)

○ 기성기간 : 2017.03.17. ~ 2017.09.30.

□ 청소실적(‘17.9월말 기준)

○ 청소기간 : 2017.03.17. ~ 2017.09.30.

○ 청소결과

구 분	계약물량	추진물량	잔여물량	비고
응집침전지, 여과지 등 주벽청소	303,080㎡	237,682㎡	65,398㎡
정수지 주벽 청소	52,522㎡	20,768㎡	31,754㎡
토사준설	133㎡	0㎡	133㎡

※  시설물별 청소실적

구분	응집·침전지						여과지					정수지		활성탄지			1차농축조		회수조		배슬러지	침전지 수로
	계	#1				#2	#1				#2	#1	#2	#1	#2	통로	#1	#2	#1	#2	#1	#1	#2
		1 계열	2 계열	3 계열	4 계열		1 계열	2 계열	3 계열	4 계열
진행률	93.3%						50%					50.0%		27.3%			62.5%		0%		0%	65.8%
대상	40	8	8	8	8	8	16	16	16	16	16	4	2	22	22	2	1	1	2	2	2	32	8
계획	60	12	12	12	12	12	128				32	4	2	22	22	6	4	4	2	2	2	96	24
실적	56	11	9	12	11	13	16	16	16	16	16	1	2	6	6	-	3	2	-	-	-	66	13

□ 기성대가 지급 검토

○ 청소물량 확인

-  청소상태 확인 : 침전지, 여과지 등 청소완료 시 현장 확인(사진촬영)

-  추진결과 보고 : 진행사항, 결과 등 추진실적 매월 결과 보고

○ 검토의견

-  금회 청소물량에 대한 기성대가 지급

․ 금회(‘17.3월~9월) 기성대가 신청 물량에 대하여 현장 감독한 결과 계약조건과 동일하게 추진됨.

○ 기성금액 산출 : 152,911,000원(64.4%)

구 분		계약금액	전회 기성		금회 기성		누계 기성		잔여 기성		비고
			금액	대비	금액	대비	금액	대비	금액	대비
총용역비		237,464,330	-		152,911,000		152,911,000		84,553,330
도급비	공급가액	215,876,664	-		139,010,000		139,010,000		76,866,664
	부가가치세	21,587,666	-		13,901,000		13,901,000		7,686,666
	소 계	237,464,330	-	0%	152,911,000	64.4%	152,911,000	64.4%	84,553,330	35.6%

□ 조치계획

○ 청소용역 계약물량 중 완료 된 금회 물량에 대한 기성대가금 지급

붙임 : 기성내역서, 기성대가 신청서, 청소실적 각 1부. 끝.