문서번호	자전거정책과-12278
결재일자	2017.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자전거시설팀장	자전거정책과장
강환희		정원영	11/03 김성영
협조
	주무관		김수영

’17년 자전거도로 유지보수 사업 변경시행

2017.11.

도시교통본부

(자전거정책과)

’17년 자전거도로 유지보수 사업 변경시행

2017년 자전거도로 유지보수 사업 예산 연내 집행을 위해 공사물량 변경 등에 따른 사업비 조정내용을 검토보고 드림

□ 추진경위

○ ’17.6.9 : 자전거도로 유지보수 1단계 사업시행을 위한 공사비 재배정 및 공사시행 협조

- 성동도로사업소 자전거전용신호등 설치관련, 북부도로사업소 보도턱낮춤 정비 관련

○ ’17.8.30 : 자전거도로 유지보수 2단계 사업시행을 위한 공사비 재배정 및 공사시행 협조

- 강북 자전거 거치대, 송파 사고다발지

○ ’17.9.26 : 자전거 유지보수 3단계 사업시행을 위한 공사비 재배정 및 공사시행 협조

- 종로, 은평, 송파 노후 구간정비

□ 사업 변경의 필요성

○ ’17년 예산 연내 집행을 위해 사업추진이 미진한 사업(동부도로사업소) 감배정하고 자전거 신호등 설치구간 토목사업비 추가필요에 따른 재배정을 통해 예산집행 및 사업추진의 실효성 확보

○ 유지보수 사업 예산 잔액을 수시배정받아 보관함, 샤워실 등 편의시설 지원

□ 예산 변경 내역

○ 자전거도로 유지보수사업 예산 배정내역

(단위 : 천원)

총예산액 (A)	설계용역비 (B)	사업부서 재배정액 (C)	수시배정잔액 (D)	잔액 (A-B-C-D)
4,923,500	231,100 (발주액 : 245,850)	4,612,190	64,282	15,928

○ 재배정 예산 변경 계획

(단위 : 천원)

연번	공사 시행기관	당초	변경 후	증감액	사 유	비고
	계			△23,360
1	동부도로사업소 기전과	94,090	15,730	△78,360	사업소 공사물량과다로 연내 공사가 어려움	감배정
2	성동구청 교통행정과	693,187	748,187	55,000	고산자교상 자전거 전용신호등 설치 관련 토목공사 추가소요(교통섬정비 조경석, 화단 등)	재배정

○ 예산 수시배정 계획

(단위 : 천원)

시행기관	계	수시배정잔액	변경배정 잔액	금회 수시 배정액	사 유	비고
자체	103,570	64,282	23,360	15,928	보관함, 샤워실, 탈의실 설치	수시배정

□ 수시배정액 사용계획

○ 설계 변경으로 인한 설계용역비 증액 50,000천원

○ 보관함, 샤워실, 탈의실 등 자전거 편의시설 설치 53,570천원

□ 향후 추진계획

○ ’17. 10.   각 사업시행부서에 예산 재배정(e-호조)

○ ’17. 12.   공사 준공.  끝.