투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 한강함상공원 조성공사 감리(선박분야) 용역

1. 한강관광사업과-2252(2017.10.30.)호와 관련입니다.

2.「한강함상공원 조성공사 감리(선박분야) 용역」건에 대하여 다음과 같이 변경 계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

용 역 명	한강함상공원 조성공사 감리(선박분야) 용역
계약상대자	(주)한국선급엔지니어링 (대표 : 이영선)
계 약 금 액	금15,485,000원 (금일천오백사십팔만오천원)
계 약 일 자	2017.06.07.
용 역 기 간	2017.06.07. ~ 2017.10.31.

나. 변경내역 : 용역기간 변경(2017.06.07. ~ 2017.11.30.)

변 경 내 역	변경전	변경후
용 역 기 간	2017.06.07. ~ 2017.10.31.	2017.06.07. ~ 2017.11.30.

다. 변경사유 : 선박공정의 추가작업 진행으로 준공기한 연장

붙    임 : 1. 용역변경계약서 1부.

2. 계약의뢰 1부.

3. 용역계약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	11/03 박기용
협조자
시행	총무과-18358	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)