아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	용산구청장(치수과장)
(경유)
제목	한강로 일대 방재시설확충 사업계획 변경에 대한 회신

1. 용산구 치수과-15379(2017.9.28)호 및 하천관리과-17047(2017.11.1)호와 관련 입니다.

2. 귀 구에서 시행중인 한강로일대 방재시설확충 사업계획 변경에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 기존관로 정비사업 구간중 암거보수공사 제외

- 기존 공사구간 중 암거보수(L=600m, 철근노출 및 재료분리) 공사는 금회 사업에서 제외하고, 추후 별도 예산을 확보하여 정비 시행

나. 빗물 펌프장 및 유역분할 관로사업비 조정

- 유역분할 관로사업비 감액분 4,063백만원을 사업비 증액에 필요한 펌프장 신설공사에 사용(국비 : `17년 추경 1,000백만원, `18년 예산 3,063백만원).

붙임 : 한강로 일대 방재시설확충사업 사업계획 조정 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	진학성		치수계획팀장	박홍봉		하천관리과장	11/06 손경철
협조자
시행	하천관리과-17208	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 시청별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3863	/전송	02-2133-1044	/	jhs2000@seoul.go.kr	/	대시민공개