＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
		상수도사업본부
수신	㈜한양아크라임 대표 박성훈 님
(경유)
제목	공사기간 연장 요청에 대한 회신

1. 서울시 상수도 발전을 위해 협조하여 주심에 감사드리며 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 한양아크라임 제17-10(2017. 10. 13.)호와 관련입니다.

3. 사당배수지 건설공사는 현재 민원해결을 위한 갈등조정 절차가 진행중으로 공사 재개시기가 불분명하여 공사 정지기간의 산정이 불확실하며, 2차공사 잔여기간이 약 2개월로 행정 처리가 충분하므로 공사기간 연장 등은 추후 검토코자 함을 알려드립니다. 끝.

							서울특별시상수도사업본부장
주무관							윤걸			시설과장					정윤홍					시설안전부장					11/07 강신재
협조자
시행			시설과-9771									(						)		접수											(						)
우	03741					서울특별시 서대문구 서소문로 51															/
전화		02)3146-1494						/전송			02)3146-1529					/													/	대시민공개