문서번호	총무과-39083
결재일자	2017.11.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		박동규	11/07 정상택
협 조
	실무사무관			정경수
	주무관			배수웅
	주무관			우석식

서울도서관 조명환경 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11

행  정  국

(총  무  과)

서울도서관 조명환경 개선 계획

서울도서관 내 조도가 낮은 시민 열람실의 조명환경을 개선하여    도서관 이용시민에게 밝은 시(視) 환경을 제공하고자 함

□ 관련근거

❍ 서울도서관 조명 추가 설치 요청(정보서비스과-8070, 2017.09.22.)

□ 도서관 조명 현황

❍ 시민들이 이용하는 열람실 및 독서실의 낮은 조도환경

❍ 자연채광을 이용하는 디지털자료실은 야간 또는 흐른 날 조도가 낮음

❍ 도서관 내 책장에 따른 일부 음영지역(어두운) 발생

생각마루(1층)	디지털자료실(2층)	일반열람실(2층)	세계자료실(4층)

□ 조도측정 현황

❍ 층별 평균조도 : *****

(단위 : lx)

평균조도	1층	2층	3층	4층	각층 자료실 비상출구
***	***	***	***	***	***

❍ 사용자 용도별 평균조도

(단위 : lx)

구 분	열람실	사무실	중앙홀 (1~4층)
설치 등기구	형광등기구 다운라이트	LED등기구	삼파장
평균조도	***	***	**

□ 도서관 조명 문제점

❍ 도서관 내 사무실의 평균조도는 *****로 높으나, 많은 시민들이 이용하는 열람실 등은 *****로 어둡다는 민원이 발생

❍ 도서관은 역사문화재로 등록되어 있어 중앙홀에 조명기구를 추가설치할 수 없는 구조로 인해 조도가 낮음

□ 조명환경 개선 추진방향

❍ 이용시민이 많은 열람실의 낮은 조도를「밝은 시(視) 환경」으로 개선

❍ 자연채광을 이용하는 자료실의 천정조명을 개선하여 밝은 분위기 조성

□ 세부 개선방안

❍ 장소별 세부 개선방안

층별	장 소	개 선 방 안
1층	장애인자료실 *******	장애인이 이용하는 자료실의 조명환경 개선 - 형광등(28W) 33개 철거 - LED 다운라이트(20W) 33개 설치
	기획전시실 *******	기획 전시에 필요한 조명환경 조성 - 형광등(28W) 18개 철거 - LED 다운라이트(20W) 18개 설치 각 구역별 전등 회로 분리

층별	장 소	개 선 방 안
2층	생각마루 *******	시민들이 가장 많이 이용하는 생각마루의 조명환경을 개선 - 형광등(28W) 31개 철거 - LED 다운라이트(20W) 31개 설치
	디지털자료실 (자연채광) *******	- 흐린 날 또는 저녁시간에 어둔운 부분을 보완하기 위한 브랏켓 벽부등(25W) 4개 설치
4층	세계자료실 *******	일부 음영 사각지대에 LED 다운라이트 (20W) 2개 보강
1~ 3층	자료실 비상출구 *******	자료실 출구의 음영 사각지대에 각 층별 다운라이트(20W) 3개씩 추가 설치(총 9개)
각층	중 앙 홀 ******	- 각 층별 벽부등 4개씩 교체(총 16개)

❍ 조도 개선(안)

조도기준(KSA 3011)			통행로 필요 기준
활동에 따른 기준	조도범위(lx)
도서관 열람실	300∼400∼600		장애인 및 노약자 사용에 따른 ***** 이상 유지 필요
객실, 대합실, 현관, 복도	60∼200∼250		문화재 회손에 따른 조명기구 추가 설치가 어려운 구역으로 기존 조명기구 램프교체

※ KSA 3011 : 한국산업규격 조도기준

□ 공사 시행 및 소요비용

❍ 공사방법 : *********

❍ 공사기간 : 2017. 12월초

- 자재 구입 : 11월(조달 구매), 공사 시행 : 12월 초

❍ 소요비용 산출 : ********

***************************************

********************************

**************************

❍ 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비

□ 공사 시행 및 소요비용

❍ 철거된 형광등기구는 내구연한 초과 및 재사용 불가로 폐기(고재처리)

❍ 고소작업에 따른 사전 안전교육 실시

❍ 도서관 휴관일인 월요일 작업 실시

붙임 : 1. 도서관 조도 측정 현황 1부.

2. 도서관 조명환경 개선 위치 도면(1~4층) 4부.  끝.