문서번호	도로보수과-11809
결재일자	2017.11.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
정회곤		김권일	11/07 김용제
협 조
	주무관			박성근
	주무관			김동민

노후포장도로 정비예산 집행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11

강서도로사업소

도로보수과

노후포장도로 정비예산 집행계획 보고

2017년 노후포장도로 정비예산(시설비)이 불용되지 않도록 예산

집행계획을 변경하여 예산집행에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		예산배정

(단위:백만원)

구 분	계	노후포장도로 정비공사	긴급복구공사	맨홀정비공사	맨홀정기점검
예산현황	9,709	7,072	1,837	600	200

※ 도시개발 특별회계(도로관리과)예산

Ⅱ		현 황

□ 사업별 예산 현황

(단위 : 백만원, ‘17.11. 6 현재)

구 분	계	노후포장 (1구역)	노후포장 (2구역)	긴급복구 공사	맨홀정비 공사	맨홀정기점검	기타
예산현황	9,709	2,900	3,057	2,500	600	200	452
지출현황 (11.6현재)	4,413 (45.5%)	217	1,710	1,605	373	60	448

※ 노후포장도로 정비예산 집행계획 보고(도로보수과-11136, 2017.10.20)

□ 노후포장도로정비공사(1구역)추진 현황

연번	노선명	위 치	차로	포장 면적 (a)	포장단면	작업(예정)일	비고
1	안양천로	고척지하차도 ↔ 오금지하차도	6	138	표층5㎝ 중간층5cm	9.11~9.16	완료
2	신정로	서부트럭터미널 교차로 ↔ 신트리공원앞 교차로	6	204	표층5㎝ 중간층5cm	9.18~10.17	완료
3	중앙로	신트리공원앞 교차로 ↔ 고척2파출소앞 교차로	6	144	표층5㎝ 중간층5cm	11.16~11.22	예정
4	남부순환로	남부순환로 550 → 강월초교앞 교차로	4	50	표층5㎝ 중간층5cm	11.23~11.25	예정
5	공항로	김포공항입구교차로↔ 방화대로입구 (중앙버스전용차로)	1	57	표층5㎝ 중간층5cm	11.27~11.28	예정
6	양천로	가양3-5단지 교차로 → 가양역 교차로	6	43	표층5㎝ 중간층5cm	11.30~12.1	예정
7	6번 국도	메이필드호텔 ↔ 오쇠삼거리	4	156	표층5㎝ 중간층7cm 기층8cm	-
		계		792

Ⅲ		예산 활용 방안

□ 노후포장도로정비공사(강서1구역)

❍ 기존 공사구간에서 1개 노선(6번국도) 2018년도 시행

- 공사물량 : t = 10㎝~20㎝, A= 792a ⇒ t = 10㎝, A= 636a

- 개략공사비 : 600백만원

- 위치도 및 현황사진

위 치 도	현장사진

□ 노후포장도로정비공사(강서2구역)

❍ 기존 공사구간 외에 1개 노선(중앙로) 추가

- 추가 공사구간

노선명	공사구간	연장 (m)	면적 (a)	SPI 지수	포장두께 (㎝)			소요예산 (백만원)
중앙로	구로소방서 교차로 ⇔ 고척2파출소앞 교차로	1,050	209	4.99	10	표층 (WC-3)	5	400
						중간층 (순환)	5

※ 코아채취 결과 균열깊이는 평균 8.3㎝이므로 포장두께 10㎝로 실시

- 위치도 및 현황사진

위 치 도	현장사진

□ 사업별 변경 예산

구 분	계	노후포장 (1구역)	노후포장 (2구역)	긴급복구 공사	맨홀정비 공사	맨홀정기점검	기타
변경	9,709	2,300 (감600)	3,457 (증400)	2,700 (증200)	600	200	452

Ⅳ		문제점 및 대책

□ 문 제 점

❍ 아스콘 납품 및 폐아스콘 운반 및 처리용역 현황

구 분	폐아스콘 운반 및 처리용역		아스콘납품사 (계약방법)
	계약방법	계약업체
노후포장도로 정비 공사(강서1구역)	수의계약	운반 : ㈜삼양이앤디 처리 : ㈜드림아스콘	㈜드림아스콘 (공개경쟁)
노후포장도로 정비 공사(강서2구역)	수의계약	운반 : ㈜삼양이앤디 처리 : ㈜드림아스콘 + ㈜검단아스콘	㈜검단아스콘 (공개경쟁)

❍ 당초 사업별로 폐아스콘 운반 및 처리용역을 발주하였으나 노후포장  도로정비공사는 1, 2구역 모두 입찰참가업체 미참여로 2회 유찰되어 수의계약으로 업체를 선정

❍ 노후포장도로정비공사(1, 2구역) 폐아스콘 운반 및 처리용역 계약  업체가 포장도로 긴급복구 및 굴착복구 용역업체와 동일업체로 야적장 부지 협소로 원활한 폐기물 반출 및 아스콘 납품이 지연되고 있음

❍ 노후포장도로정비공사(강서1구역)의 사업구간인 6번국도는 폐아스콘 물량 약 7,300 톤으로, 현재 남아있는 사업기간 중에는 폐기물 처리업체의 처리용량 부족 및 자체 처리일정으로 인해 폐기물처리 및 아스콘 납품이 어려운 실정임

□ 대    책

❍ 노후포장도로정비공사(2구역)아스콘 납품사인 ㈜검단아스콘은 현재 계약된 운반업체 ㈜삼양이앤디와 공동수급 협정을 체결하여 폐아스콘 반출 및 아스콘 공급이 원활하게 진행되고 있음

❍ 국도6호선 구간은 2018년 가로등 설치공사(강서구 도로과-15551, 2017.9.21.)와 병행하여 시행하고, 차선마모로 시인성이 저하되어 차선도색을 요청하는 민원이 있었으므로 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가) 업체에 차선도색 작업지시

❍ 예산의 효율적 사용을 위해 동절기 대비 포트홀 및 균열발생 예상구역을 2017년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)업체로 하여금 정비 및 2구역 추가구간(중앙로) 시행

Ⅴ		조치계획

❍ 위와 같이 노후포장도로 정비공사의 변경 시행을 통해 추가공사를 시행하고, 추후 설계변경시 반영하여 사업예산이 불용되지 않도록 예산집행을 철저히 하고자 함.  끝.