문서번호	한양도성도감-11379
결재일자	2017.11.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
채희창		곽동진	11/07 심말숙
협조

「한양도성 통합관제망 구축 사업」관련

전용회선 개통을 위한 광케이블 공사 계획

2017. 10

문화본부

한양도성도감

「한양도성 통합관제망 구축 사업」관련

전용회선 개통을 위한 광케이블 공사 계획

한양도성 통합관제망 구축사업과 관련하여 구축된 CCTV영상을 통합관제센터에서 관제하기 위한 전용회선 개통을 위해 다음과 같이 광케이블 공사를 시행하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 「한양도성 통합관제망 구축」을 위한 정보통신공사 및 관급자재(CCTV) 구매 설치가 완료 단계에 있어 전용회선 개통이 필요하나,

○ 통신사인 ㈜KT에서 전용회선 공급이 불가하다는 통보에 따라 광케이블 공사를 직접 시행하고자 함

□ 추진경위

○ ‘17. 3.  : 통신사 ㈜KT와 전용회선 개통 가능여부 사전협의

- 협의결과 : 전용회선 17회선(12개소) 전부 개통 가능(한전주 사용 포함)

○ ‘17.7.5 ~ 10.31 : 한양도성 정보통신망 구축 정보통신공사

○ ‘17.7.25 ~ 10.31 : 한양도성 정보통신망 구축공사 관급자재(CCTV) 구매 설치

○ ‘17. 09. 26 : 전용회선 신청(서울시 → ㈜KT)

○ ‘17. 10. 23. : ㈜KT, 서울시 합동 전용회선 설치 위한 현장 확인

- 결 과 : 11개 회선(CCTV 32대) 가능, 와룡공원 4회선(CCTV 14대) 및 사직공원 2회선(CCTV 8대)일부 회선 전용회선 설치 불가 확인

- 설치불가 사유 : 전용회선 설치에 한전주를 이용하면 가능하나 ㈜KT에서 한전주를 이용하지 않는다는 내부방침 시행(‘17년 8월)에 따라 별도 지주를 설치하면서까지 전용회선 공급은 불가

□ 다른 통신사 전용회선 이용방안 검토 : 적용 불가

○ SK브로드밴드

- 유선 : 현장에 광케이블이 없어 연결 불가

- 무선(LTE) 전송회선 : 적용 곤란

․ 1대당 최대 전송속도 1.2Mbps로 부적당(최소 2Mbps 소요)

․ CCTV 대수만큼 회선 필요하여 비용이 과다 소요되어 불리

○ LGU⁺ : 전용회선 요청하였으나 불가 확인

□ 추진계획

○ 추진방안 : 전용회선 개통을 위한 광케이블 공사 직접 시행

○ 추진사유

- 통합관제망 구축을 위한 정보통신공사 및 CCTV 설치가 2017년 10월말 완료되어 11회선(CCTV 32대)은 즉시 운영이 가능하나, 전용회선이 없는  2개소 6회선(CCTV 22대)은 운영을 할 수 없으므로, 조속한 개통을 위해 「전용회선 개통을 위한 광케이블 공사」 직접 시행 추진

○ 추진방법

- 공사명 : 전용회선 개통 광케이블 공사

- 규  모

․ 한전주를 이용하여 KT 전용회선 접점까지 광케이블(300미터) 포설 공사

※ 서울시와 한전 간 협정으로 서울시는 한전주 이용 가능

☞ 와룡공원 광케이블 270m 및 사직공원 광케이블 30m 포설 등 한전주 8본 이용

- 공사업체 : ㈜메트로컴넷(대표 최선민)

․ 업체 소재지 : 서대문구 홍은동 **************

- 공사기간 : ‘17. 11. 7. ~ 11. 13.

○ 소요예산

- 공사금액 : 3,635천원(부서카드 결제 후 일상경비 지출)

- 한전주 사용료 납부 : 연 100천원(본당 약 700원/월)

- 예산과목 : 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 한양도성 통합관제망 구축 및 운영-문화재 방재시설 유지관리(국비), 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ ‘17. 11. 07. ~ 11. 13. : 공사 시행

○ ‘17. 11. 14. ~ 11. 15. : 미개통 구역(6회선, 22대) 개통 점검  ○ ‘17. 11. 16. ~ : 통합관제망 정상 운영

붙임  산출기초조사서 1부.  끝.