문서번호	한양도성도감-11370
결재일자	2017.11.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
채희창		곽동진	11/07 심말숙
협조

낙산공원 CCTV 추가 설치 등

한양도성 통합관제망 개선공사 추진계획

2017. 11

문화본부

(한양도성도감)

낙산공원 CCTV 추가 설치 등

한양도성 통합관제망 개선공사 추진계획

한양도성 통합관제망 운영과 관련하여 낙산공원 정상부에 CCTV 사각

지대 발생 등 미비점 보완과 관제업무 효율성 제고를 위해 개선공사 추진

Ⅰ		추진배경

□ 낙산 정상공원 제1전망광장 부근의 성벽에 오르는 시민이 많으나

근거리에 CCTV가 없어 효과적인 관제에 차질이 있어 개선 필요

※ ‘17.8.10자 동아일보 보도(성곽길 위험천만한 밤 풍경)

□ ‘16년 낙산공원 CCTV 설치 시 기존 가로등 폴에 설치한 비상벨이 목재 펜스로 차단되어 접근이 어려워 개선 필요

□ ‘17.11월부터 관제대상 CCTV 수가 180여 대로 증가하여 관제 업무 효율성을 위해 DID화면 변경 등 관제실 구성 변경 필요

※ 관제실 전면 DID모니터로는 영상이 한눈에 들어오지 않음

Ⅱ		공사내용

□ 낙산 제1전망광장 부근 CCTV 설치

□ 카메라 2대, 스피커 2개, 비상벨 1개 설치

□ 비상벨 위치 조정

□ NS23-3, 24-01, 26-11, 27-01 폴의 비상벨을 나무 펜스 가까이에

허리 높이의 신규 폴을 설치하여 위치 이동

□ 관제업무 효율성을 위해 관제실 화면 구성 변경

□ 관제용 PC 3대, 관제용 모니터 2대

Ⅲ		추진방법

□ 공 사 명 : 한양도성 통합관제망 개선 공사

□ 공사기간 : 계약일로부터 1개월

□ 계약업체 : ㈜우리통신(대표 박현준)

- 주소지 : 서울시 종로구 동숭길 122, 지하101호(동숭동, 동숭아트센터)

□ 계약방법 : 1인 견적 수의계약

□ 사 유 : 추정가격이 2천만 원 이하인 소액공사이며, 2016년 낙산구간 CCTV 설치공사를 수행한 경험이 있는 업체와 수의계약하여 신속·정확히 사업을 마무리 하고자 함

□ 근 거 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조

제1항제5호가목 및 제30조제1항제2호

□ 예산사항

□ 소요예산 : 19,487천원

□ 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 한양도성 통합관제망 구축 및 운영-문화재 방재시설 유지관리(국비), 시설비

Ⅳ		추진일정

□ ‘17.11 : 문화재청 현상변경 허가 신청

□ ‘17.11 : 공사 발주 및 사업자 선정

□ ‘17.12 : 공사 시행 및 준공

붙임 : 1. 추진배경 설명 자료 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.