아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 오류고가 보수공사관련 추가 작업 요청사항 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시와 귀사간에 계약 체결하여 시행중에 있는 2017년 오류고가 보수공사와 관련하여 시설물 점검시에 발견된 손상 등을 조치코자 아래와 같이 추가작업 요청하오니, 동 공사에 포함하여 2017.11.30.까지 보수완료하여 주시기 바랍니다.

가. 추가공사 내역 : 1) 신축이음장치 하부 유도배수로 설치(A1,P3,A2)

2) 점검통로 미설치구간 추가 설치(P2, P6) 31.2m

3) 도로표지병 추가설치(양측 좌우) 134개소

나. 추가공사비 조치 : 추후 본공사 설계 변경시 정산 시행.

붙 임 : 오류고가 추가 작업 도면 및 현장사진. 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	1종교량 보수보강공사 건설사업관리단 책임기술자,(주)에듀건설 현장대리인
주무관	전재형		강남일반교량팀장	이홍재		교량안전과장	11/07 한유석
협조자
시행	교량안전과-20031	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2층 교량안전과	/
전화	02-2133-1975	/전송	02-2133-1429	/	jahe2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)