투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	용역기한 연기 요청(여의하류2교 외 5개소 정밀점검용역)

우리 사업소에서 시행중인 『여의하류2교 외 5개소 정밀점검용역』에 대한 용역기한을 다음과 같이 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 여의하류2교 외 5개소 정밀점검용역

나. 계 약 자 : (주)한국국토안전연구원 대표 신광식

다. 용역기간 변경

- 당 초 : 2017. 4. 3 ~ 2017. 11. 8

- 변 경 : 2017. 4. 3 ~ 2017. 11. 23

라. 연기사유

개봉철도고가 바닥판 교체방안에 대한 심도있는 검토 및 전문가 자문 등 시행에

따른 소요기간(15일) 추가 필요

마. 지체상환금 부과여부 : 미 부과

따로붙임  1. 준공기한 연기 검토보고서 1부

2. 용역기한 연기의뢰서 1부.  끝

	시설보수과장
주무관	유태용		시설보수과장	11/07 박병연
협조자
시행	시설보수과-9385	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7971	/전송	02-2657-7970	/	yty1703@seoul.go.kr	/	대시민공개