문서번호	토목부-23155
결재일자	2017.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	11/07 김영수

비탈면 측면부 점검로 삭제 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

2017.11.

도시기반시시설본부

(토 목 부)

비탈면 측면부 점검로 삭제 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

깎기 비탈면 유지관리 점검로에 대하여 설치토록 설계에 반영되어 있으나, 주변에 등산로와 연계하여 점검이 가능함으로 삭제 방안 검토 보고드림.

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4차~6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2017.11.30.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 38,876백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

검  토

○ 깎기 비탈면 유지관리를 위해 설계된 측면부 점검로가 현장 확인결과 깎기비탈면 측면부 경사가 완만한 지형의 짧은 구간이고, 주변 농지 진입로 및 등산로가 있어 비탈면 점검을 위한 접근이 용이하므로 별도의 점검로 설치는 불필요하다고 판단됨.

공사비 증·감

(단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증․감	비 고
직접공사비	1식	9,562	0	-49,562
제 경 비	1식	3,338	0	-3,338
공급가액	1식	12,900	0	-12,900
부가가치세	1식	14,190	0	-14,190
도급공사비	1식	16,650	0	-16,650

감리단 검토의견

○ 깎기 비탈면 유지관리를 위해 설계된 측면부 점검로 설치를 위한 현장 확인결과 깎기 비탈면 측면부 경사가 완만한 지형의 짧은 구간이고, 주변 농지 진입로 및 등산로가 있으므로 비탈면 점검을 위한 접근이 용이하며, 깎기고가 기준높이 20m 이하 이므로 불필요하다고 판단됨.

○ 따라서, 깎기비탈면 측면부 점검로는 삭제하고 추후 설계변경시 반영하고자 실정보고 함.

조치계획

○ 깎기 비탈면 점검로 삭제를 위하여 보고한 사항에 대하여 감리단 검토 의견과 같이 반영이 필요함.

○ 감액되는 공사비 16,650천원에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.