문서번호	급수운영과-20214
결재일자	2017.11.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
박홍		11/08 代이승우
협 조

준공기한 연기보고(신설-64)

2017. 11.

강남수도사업소

(급수운영과)

준공기한 연기보고

1. 현    황

○ 공사위치 : 강남구 **********

○ 작업지시 : 신설-64

○ 공사개요 : 신설(D=25mm, L=3m)

○ 공사기간 : 2017. 10. 18. ~ 2017. 10. 27.

2. 보 고 내 용

○ 상기 위치는 공사현장 보호통 설치위치에 자재물 적치로 인하여 수요가로부터 본 공사건에 대하여 공사기간 연기를 요청한 사항임.

3. 조치의견

○ 상기 보고내용에 의거 현재 작업지시한 공사건에 대하여 아래와 같이 공사기간을 연기하고자 합니다.

․ 당초: 2017. 10. 18. ~ 2017. 10. 27.

․ 변경: 2017. 10. 18. ~ 2017. 11. 30.

○ 지체상금 부과여부: 미부과.  끝.