준공기한 연기 보고

(***********)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	조민성	박장진	11/08 代박장진

1. 제    목 : 급수공사 기한 연기 보고

2. 현    황

위 치	신청인	지시번호	급수공사 신청일자	공사개요	당초공사기간
***********	***	개량-074	17. 09. 18	25mm 구경확대	17. 07. 31. ~ 10. 31.

3. 연기사유

□  상기와 같이 급수공사(개량)로 접수되어 17.10.20.일자로 연간단가 업체에 시공지시하였으나,

□  현황을 파악한 바, 건물주 해외 출장으로 인하여 부득이 공사기한을 연기하여야 할 실정임.

4. 조치의견

□  상기 실정에 따라 급수공사 기한을 ‘17.11.17.까지 연기하고자 합니다.  끝.