＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	현장실정 보고에 대한 회신(폐기물 증가 외 4건)

1. 공사감독2처-13247(2017.11.8.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리사업소가 발주하고 귀 공단에서 감독중인 「이수고가차도~사평지하차도간      배수관정비공사」 현장실정 보고 사항에 대하여 아래와 같이 검토결과를 회신하오니      안전사고 예방 및 공사장 관리에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 설계변경시 중복사항, 과다사항 등이 없도록 하고 현장지도시 확인내용 및 감독자 증빙자     료(시공사진, 설계도서 등)에 따라 정확한 설계변경이 되도록 처리하시기 바랍니다.

가. 실정보고에 대한 검토결과

실정보고 현황	문 제 점	공 단 의 견	사업소 검토결과
- 신관부설 연장 증가, 폐기물증가, 교통정리 원증가, 관마개설치 철 거 공종추가 사항이 당초 설계내역 보다 증가 및 추가 발생되 어 설계변경 반영이 필 요함	신관부설 연장 부족분 에 대한 마무리 연결 작업 설계변경 폐기물 증가분에 대한 폐기물량 반출 설계 변경 교통정리원 물량증가 에 대한 설계변경 관마개 설치 철거 공 종 추가 발생 설계 변경 폐관충진 기계기구 및 플랜트 설치철거 물량 증가에 대한 설계변경	신관부설 연장 부족분 에 대한 마무리 연결 작업 설계변경 → 반영 폐기물 증가분에 대한 폐기물량 반출 설계 변경 → 반영 교통정리원 물량증가 에 대한 설계변경 → 반영 관마개 설치 철거 공 종 추가 발생 설계변경 → 반영 폐관충진 기계기구 및 플랜트 설치철거 물량 증가에 대한 설계변경 → 반영	- 폐기물 증가 외 4건에 대 해 정상적 공사품질을 위 해 당초 설계내역 보다 증 가된 물량 및 추가공종에 대한 귀 공단 현장실정 보 고 의견대로 설계 변경에 반영 조치

끝.

	강남수도사업소장
주무관	강희창		시설관리과장	전결 11/08 박은선
협조자
시행	시설관리과-24834	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)459-4	/
전화	02-3146-4905	/전송	02-3146-4939	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	부분공개(6)