문서번호	행정지원과-28659
결재일자	2017.11.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
이병돈	김광석	서경만	11/08 박영헌

팔각정 하단 암반사면 낙석 붕괴에 따른

안전조치 계획(안)

2017. 11. 8.

서부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

팔각정 하단 암반사면 낙석 붕괴에 따른

안전조치 계획(안)

우리 사업소 팔각정 하단 암반사면에서 발생한 낙석붕괴에 따른 후속 조치 계획을 수립·시행하여 시설물 안전관리에 최선을 다하고자 함.

❏ 사 고 개 요

❍ 일 시 : 2017. 11. 3(금) 16:30분경

❍ 원 인 : 절개지 주변 나무(아카시아 등) 뿌리에 의한 절개지 붕괴

❍ 내 용 : 팔각정 하단부 절개지(무악 청구아파트 107동 뒤쪽)로 붕괴로 낙석(약 15톤) 발생

❍ 피해상황 : 인적, 물적 피해 없음

❍ 현장 조치 사항

- 유관기관 현장 확인 및 합동조사 : 소방서 외 3개 기관

- 사고현장 접근 금지을 위한 안전휀스 설치

- 아파트관리 사무소 협조 요청 : 순찰 및 차량주차 통제 등

- 전문가(산림청, 서대문구청 푸른도시과) 의견에 따라 추가 붕괴 위험 없을 것으로 판단하여 20시경 철수 후 당직 순찰 지시

❏ 안전진단 전문가 의견 수렴

❍ 일    시 : 2017. 11. 7(화) 10:00

❍ 전 문 가 : 주식회사 아주엔지니어링 부장 이덕영, 허성현

❍ 자문의견 : 추가 붕괴 위험은 없음

- 붕괴원인 : 나무 뿌리 성장에 따른 암반 붕괴(전문가 의견서 참고)

- 단기대책

· 암반사면 1~2m 이내의 수목제거 및 고사

· 붕괴 지점 상부에 탈락 위험이 있는 암괴 제거 및 낙석 정리

- 장기대책

· 면밀한 분석(정밀안전진단 등)에 의한 추가 붕괴 가능성 여부 파악

· 보강 대책을 강구하여 영구 비탈면으로서의 기능 확보

❏ 향후조치계획

❍ 2017. 11.  9.  수목제거

❍ 2017. 11. 14.  붕괴 암석 정리

❍ 2017. 11월중.  정밀안전진단실시 및 재난기금 신청 검토

❏ 위험수목 제거 및 붕괴 암석 정리(단기대책)

❍ 계약방법 : 수의계약(소액)

❍ 소요예산 : 약 10,000천원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령 제25조 제1항 제2호

- 지방자치단체를 당사자로한는 계약에 관한법률 시행규칙 제 30조 4호

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령 제25조 제1항 제5호 나목

- 2017 수의계약 제도 개선계획(행정1부시장 제84호 2017. 3.17.)

❏ 정밀안전진단 및 보강 공사 실시(장기대책)

❍ 소요예산 : 약 320,000천원

- 정밀안전진단 : 약20,000천원

- 보강공사(Rock anchor + 기대기 옹벽) : 약300,000천원

❍ 예산 확보 방안 : 2018년 예산 및 재난기금 신청 검토

붙임 전문가 의견서 1부.  끝.