문서번호	종보전연구실-5926
결재일자	2017.11.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		종보전연구실장	동물원장
이현호		代차준호	11/08 박진순
협조	종보전연구실장		어경연
	총무과장		이행용

"고압멸균기 구매" 건

납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

종보전연구실

『고압멸균기 구매』 건

납품기한 연기 검토 보고

조류인플루엔자 긴급대응과 관련하여 AI 발생시 감염개체의 신속한 멸균처리를 위해 구입 추진중인 『고압멸균기 구매』 건의 납품기한 연기 사유가 발생하여 보고 드림.

Ⅰ				관련

고압멸균기 구매 : 종보전연구실-4703(2017.09.06.)호

계약체결 통보 : 고압멸균기 구매 : 총무과-11536(2017.09.15.)호

Ⅱ				계약 개요

계 약 명 : 고압멸균기 구매

계약금액 : 금15,950,000원

계약업체 : 주식회사 비엠에스

납품기한 : 2017. 11. 12.

Ⅲ				연기 사유

제조사(이스라엘, Tuttnauer사)의 제조납품이 통상의 경우 보다 늦어지고 있어 지속적으로 독촉하고 있으며,

제조과정 및 예약물량 등으로 인해 11월말경 수입이 가능한 상황

Ⅳ				검토 의견

납품기한 연기

계약명	납품기한
	변경 전	변경 후
고압멸균기 구매	2017.11.12.	2017.12.10.

지체상금 부과여부 : 미 부과

계약업체 의지나 노력과 상관없이 제조사의 사정으로 인해 납품이 지연되고 있어 지체상금 미부과 조건으로 납품기한 연기코자 함.

Ⅴ				예산과목

치수 및 하천관리, 치수사업, 재난관리기금 재난계정, 응급복구, 자산취득비

붙임  계약업체 납품기한 연기 요청 공문 1부.  끝.