투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행 한강준설(저수로, 취수장) 정비공사 감독권한대행 건설사업관리용역

『한강준설(저수로, 취수장) 정비공사 감독권한대행 건설사업관리용역』에 대해 아래와 같이 설계변경(1회) 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 한강준설(저수로, 취수장) 정비공사 감독권한대행 건설사업관리용역

나. 계약기간 : 2017. 3.16 ∼ 2017.11.10

다. 계약금액 : 198,059,000원

마. 감 리 사 : 주식회사 케이지엔지니어링종합건축사사무소

바. 변경내용

구 분	용 역 비			비고 (단위:원)
	당 초	변 경	증·감
감 리 비	198,059,000	262,245,000	64,186,000

사. 설계변경사유

- 건설사업관리자 투입계획 변경

아. 준공기한연기

- 당    초 : 2017.3.13. ~ 2017.11.10

- 변    경 : 2017.3.13. ~ 2018.03.31

- 연기사유 : 국가하천유지보수비(준설공사) 예산 추가투입 및 여의샛강 하상정비공사 착공(11월)에 따른 건설사업관리자 투입기간 조정

- 귀채소재 : 한강사업본부

- 지체상금 : 미부과

자. 예산과목

- 깨끗하고 안전한 한강만들기, 한강하천시설관리, 한강저수로정비, 감리비

- 깨끗한 물관리, 한강수질개선, 잠실상수원퇴적물준설, 감리비

- 치수및하천관리,하천복원및정비,한강관광자원화,시설비(‘17년 국비)-64,186천원

첨부 : 1. 투입계획 변경 보고서

2. 검토의견서 1부

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

주무관	김동식		치수과장	신용철		시설부장	11/08 최진석
협조자	주무관	심옥경		기획예산과장	김건태		총무과장	박병현
시행	치수과-3936	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0687	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개