문서번호	시설과-3455
결재일자	2017.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최지효	송복식	代송복식	11/09 이용태
협 조

『잠원119안전센터 옥상녹화 텃밭조성공사』 예비준공검사 결과보고

2017. 11.

동부공원녹지사업소

(시   설   과)

『잠원119안전센터 옥상녹화 텃밭조성공사』예비준공검사 결과보고

『잠원119안전센터 옥상녹화 텃밭조성공사』와 관련 예비준공검사를 실시하고 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 잠원119안전센터 옥상녹화 텃밭조성공사

❍ 공사기간 : ’17.9.29 ～ 11.17

❍ 총공사비 : 105,953,540원(도급 86,795,870원/관급 19,157,670원)

❍ 도 급 자 : 아이서비스㈜ 대표 김종수

❍ 공사내용

- 옥상녹화면적 : 혼합형 276.82㎡ (2층 31.46㎡, 3층 144.83㎡, 지붕층 100.53㎡)

- 식재기반 : [방수방근] 바닥 276.49㎡, 벽면 53.88㎡

[식재기반] 인공토 58.16㎥

- 식재 : [교목] 반송 등 2종 4주 [관목] 눈향나무 등 7종 2,068주

[지피] 가우라베이비 등 13종 2,774본, 잔디 43.48㎡, 바크 23.82㎡

- 시설물/포장 : [시설물] 등의자 등 6종 [포장] 화강석블록 등 4종

- 우배수 : 배수판 276.49㎡, 부직포 276.49㎡, 배수가림막 161.27㎡, 자갈배수로 164.71㎡, 배수점검구 17개소

- 관수 : QC밸브 5개소, STS PIPE 23.5m

Ⅱ		예비준공검사 개요

❍ 일    시 : ’17. 11. 7(화)

❍ 참 석 자 : 총7명

- 동부공원녹지사업소 : 소장, 공원조성팀장, 담당 2

- 잠원119안전센터   : 센터장, 직원 1

- 도급사             : 현장소장

❍ 주요내용 : 공사 준공 전 사전점검

❍ 점검결과 조치의견

- 잠원119안전센터 요구에 따른 휴게시설 보완 설치(탁자 1, 의자 2)

- 지붕처마 낙수로 인한 녹지대 훼손 부분은 자갈수로로 변경하여 훼손방지

- 2층 차폐휀스는 관급 수급이 불가한 사항은 도급에 반영하여 설치하고, 측면부 제외 전면부만 시공

- 빈 공간이 발생하지 않게 식재 보완하고, 플랜트 식재 수종에 대하여는  현장여건 반영하여 적합한 수종으로 변경 검토

❍ 점검사진

Ⅲ		향 후 계 획

❍ ’17.11. 9 ~ 11.17 : 설계 변경 및 공사 준공

❍ ’17.11.20 ~ 11.24 : 준공검사.  끝.