	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(제2회)시행(2017년 포장도로 긴급복구 정비공사-연간단가)

우리사업소에서 시행중인 『2017년 포장도로 긴급복구정비공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제2회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2017년 포장도로 긴급복구 정비공사(연간단가)

2. 도 급 자 : ㈜진림건설 대표 이학순, 조남기

3. 공사기간 : 2017. 3. 9. ~ 2017. 12. 20.

4. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	변 경 내 역				비 고
	당 초	변 경	증 감
총공사비	2,108,643,000	2,392,647,000	증	284,004,000
도 급 비	1,089,643,000	1,527,647,000	증	438,004,000
관 급 비	1,008,000,000	854,000,000	감	154,000,000
이 전 비	11,000,000	11,000,000		-

5. 변경사유

- 소규모포장 항구복구, 섬유그리드 시공, 동공작업 등 신규공종 발생

- 공종별 시공물량 증․감 및 관급자재 물량변경 사항 반영

6. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로 정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 1. 설계변경(제2회) 사유서 1부.

2. 설계변경(제2회) 검토보고 1부.

3. 설계변경내역서(제2회) 1부.

4. 합의각서(제2회) 1부.  끝.

주무관	이석연		주무관	代박해웅		도로보수과장	김환겸		동부도로사업소장	11/09 송만규
협조자	주무관	장인숙
시행	도로보수과-10678	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0344	/전송		/	wartry@seoul.go.kr	/	부분공개(5)