문서번호	도로보수과-11898
결재일자	2017.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		강종훈	11/09 代안근
협 조
	주무관			代권순회

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제15차)

2017.  11. 09.(목)

서부도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제15차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2017. 04. 03. ~ 2017. 12. 31.

○ 시 공 사 : ㈜렉스  대표 전현신

○ 도 급 비 : 514,974,900원

□ 작업완료 내역

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제15차)

○ 작업위치 : 용산구 이촌로 신용산 초등학교 앞 등 40개소

○ 작업기간 : 2017. 09. 15. ~ 2017. 10. 30.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	68,063천원	84,990천원	증) 16,927천원
관급자재	31,019천원	41,839천원	증) 10,820천원

○ 작업내역

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
1	용산구 이촌로 신용산 초등학교 앞	835m	815m	감) 20m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
2	은평구 백련산힐스테이트 206동 앞	314m	314m	-
3	서대문구 증가로 78 서부중앙교회 앞	436m	373m	감) 63m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
4	용산구 새창로12길 용문주민센터 주변	46m	46m	-

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
5	은평구 은평터널로 신성아파트101동 앞	136m	136m	-
6	은평구 가좌로 200 응암초등학교 앞	1,179m	1,179m	-
7	중구 칠패로 28 순화동 염천교 교차로	268m	315m	증) 47m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
8	중구 한강대로 416 서울스퀘어 주변	50m	50m	-
9	중구 서소문로 99 중앙일보사 앞	73m	73m	-
10	용산구 서빙고로 용산가족공원 주차장 앞	194m	139m	감) 55m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
11	서대문구 통일로 197 영천시장 앞	704m	541m	감) 163m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
12	은평구 진관1로 21-9 신도교 교차로	842m	0m	감) 842m	구청에서 작업하여 작업취소
13	은평구 통일로 934 박석고개	119m	60m	감) 59m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
14	중구 세종대로 84 시청교차로 주변	341m	440m	증) 99m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
15	중구 서소문로 88 경찰청사거리 주변	457m	454m	감) 3m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
16	용산구 청파로 서울역서부교차로 주변	18m	18m	-
17	마포구 마포대로 137 태영교차로	31m	28m	감) 3m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
18	마포구 월드컵로 마포농수산물센터 교차로	230m	151m	감) 79m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
19	마포구 마포대로 롯데캐슬아파트	163m	199m	증) 36m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
20	중구 난계로 141 신당초교 주변	60m	49m	감) 11m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
21	중구 퇴계로2가 현대자동차 앞	56m	56m	-
22	중구 퇴계로 307 광희빌딩 주변	220m	0m	감) 220m	구청에서 작업하여 작업취소
23	중구 청구로 77 청구역사거리 주변	99m	720m	증) 621m	퇴색구간 추가 재도색 작업완료
24	중구 서울역광장 교차로	205m	194m	감) 11m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
25	서대문구 창천동 연세대학교 앞	99m	142m	증) 43m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
26	중구 을지로1가 200 시청 앞	332m	691m	증) 359m	퇴색구간 추가 재도색 작업완료
27	중구 남대문로4가 29 숭례문수입상가 앞	492m	1,088m	증) 596m	퇴색구간 추가 재도색 작업완료
28	중구 시청역에서 프라자호텔 방향	50m	39m	감) 11m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
29	중구 소공로 한국은행앞~회현사거리	823m	3,602m	증) 2,779m	퇴색구간 추가 재도색 작업완료
30	용산구 한남대로 한남오거리 유턴구간	18m	18m	-
31	서대문구 모래내로 392 ~ 모래내로 411	731m	898m	증) 167m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
32	은평구 진흥로 대조시장 앞	70m	65m	감) 5m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
33	용산구 청파로 349	36m	0m	감) 36m	구청에서 작업하여 작업취소
34	용산구 청파로47길 1	75m	66m	감) 9m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
35	용산구 청파로 263 신광여고 정문 앞	84m	45m	감) 39m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
36	용산구 청파로 209	72m	0m	감) 72m	구청에서 작업하여 작업취소
37	용산구 원효대교 북단~구)용산구청	10,909m	9,738m	감) 1,171m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
38	마포구 독막로 합정역~독막길입구	6,575m	9,488m	증) 2,913m	퇴색구간 추가 재도색 작업완료
39	마포구 월드컵로 월드컵경기장~농수산시장	5,705m	7,207m	증) 1,502m	퇴색구간 추가 재도색 작업완료
40	마포구 증산로 월드컵경기장 사거리	27m	4,592m	증) 4,565m	예방적 도로보수 구간 재도색
	합 계	33,174m	44,029m	증)10,855m

○ 변경사유

- 예방적 도로보수구간 재도색     :  1개소

- 퇴색구간이 있어 추가 재도색    :  6개소

- 구청에서 작업완료구간 작업취소 :  4개소

- 실 작업량 변동에 따른 물량차이 : 20개소

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 실제 작업완료분 내에서 기성준공 처리.

붙 임 : 1. 제15차 작업완료 내역서 및 수량산출서 각 1부.

2. 제15차 작업완료 사진대지 1부(별도첨부).

3. 제15차 작업완료 도면 1부(별도첨부).  끝.