문서번호	정수과-12359
결재일자	2017.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
유은주		代김경진	11/09 이성락
협조
	주무관		박소현

장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성용역 완수기한연기 및 예산사고이월 보고

2017.11.

영등포아리수정수센터

(정수과)

장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성용역

완수기한연장 및 예산사고이월 보고

우리센터 취·정수장 유해화학물질 취급시설에 대한 장외영향평가서 및 위해관리계획서의 환경부 검토가 지연되고 있어 해당 용역사업 기한을 2018.6.30으로 연장하고 예산을 사고이월 하고자 함

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 장외영향평가서 및 위해관리계힉서 작성용역

□ 용역기간 : 2017.3.20.~2017.11.19

□ 용역업체 : (재)한국화학융합시험연구원

□ 계약금액 : 금43,223,220원

Ⅱ		추진경과

□ 용역 계약 체결  : 2017.3.15.

□ 착수보고회 개최 : 2017.3.20.

□ 장외영향평가서 환경부 제출 : 2017.6.5.

○ 검토중, 영업허가 진행 안내(화학물질안전원 사고예방심사과-10172)

□ 위해관리계획서 환경부 제출 : 2017.7.3.

□ 위해관리계획서 환경부 수정·보완 요청 : 2017.9.12.

□ 위해관리계획서 환경부 수정·보완 제출 : 2017.10.13.

○ 검토중

Ⅲ		용역기한 연장 및 예산사고이월

□ 용역기한 연장

당초	변경
2017.3.20.~2017.11.19.	2017.3.20.~2018.6.30.

○ 연장사유 : 환경부 화학물질안전원에서의 검토 기간 지연과 수정·보완 기간까지 고려하면 내년으로 기한 연기가 필요함

□ 예산사고이월

계약금액	선금지급(2017.6.8.)	사고이월금액
43,223,200원	12,960,000원	30,263,200원

○ 사고이월사유 : 용역기한 연장에 따른 이월

Ⅳ		향후계획

○ 계약업체와 합의서 작성

○ 용역 계약변경(기한연장) 행정관리과 요청

○ 용역비 예산 사고이월 신청

○ 환경부 최종 승인후 용역준공

붙임 : 용역계약서 1부. 끝.