문서번호	시설보수과-9507
결재일자	2017.11.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김규춘		전결 11/10 代유태용
협조

- 도림천복개(좌안)보수공사 -

설계변경 검토 보고(정산)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11

강서도로사업소

시설보수과

- 도림천복개(좌안)보수공사 -

설계변경 검토 보고(정산)

2017년도 예산사업으로 시행한『도림천복개(좌안)보수공사』와 관련 감독위탁기관인 시설관리공단으로부터 접수된 설계변경(정산) 검토결과 보고 임

※ 근거 : 서울특별시시설관리공단 공사감독 1처-8484호(2017.11.9)

Ⅰ		공사현황

공 사 명 : 도림천복개(좌안) 보수공사

공사기간 : 2017.6.20 ~ 2017.11.16

공사개요 : 교면포장 67.5a, 교면방수 6,750㎡, 표면보수 1,339㎡, 기타1식

도 급 액 : 631,572,400원

계 약 자 : 정민바우텍  대표 차 정 훈

감 독 자 : 서울특별시시설관리공단 공사감독 1처 박준혁

Ⅱ		설계변경 주요내용

현장실정보고에 따른 설계변경 반영

○ 관련근거: 공사감독1처-5730(2017.8.8.), 공사감독1처-7940(2017.10.25.)

○ 주요내용

- 표면보수 작업장비 변경(트럭탑제형 크레인 → 리프트 장비)

- 임시차선 설치 및 작업용 발전기 반영

- 교통정리원 및 교통안전간판 추가 반영

- 상판보수 공법 변경 반영(초속경몰탈 → MMA보수몰탈)

- 품질시험(교면방수 현장시험) 수수료 반영

기타 설계변경 반영

○ 제경비 실정산 반영(건강보험료, 연금보험료, 퇴직공제부금 등)

○ 공종별 물량 변경(증·감)에 따른 변경

주요공종 물량 변경(증·감)

공종	규격	단위	물 량
			당 초	변 경	증·감
교면포장	야간, T=5CM	a	67.55	66.32	감)1.23
교면방수	야간, 도막식	㎡	6,755	6,632	감)123
상판보수공(초속경)	초속경(야간), 치핑	㎡	33	0	감)33
상판보수공(MMA보수몰탈)	t=30mm, 야간	㎡	0	81.3	증)81.3
유공관설치	야간, D10mm	m	394	388	감)6
성형줄눈설치	야간,t=10mm,h=4cm	m	453	0	감)453
주입줄눈설치	야간,t=15mm,h=4cm	m	819	331	감)488
차선도색	백색,파선,B=15cm	m	1,759	2,289	증)530
임시차선	백색,파선,B=10cm	m	0	2,289	증)2,289
임시차선	황색,실선,B=10cm	m	0	617	증)617
임시차선	백색,실선,B=10cm	m	0	282	증)282
임시차선	백색,문자,B=10cm	m	0	232	증)232
도로표지병 설치	부착식,양면,유리알	개소	232	0	감)232
시선유도봉 설치	250*80*750	개소	12	0	감)12
접착식 도로표지병	RG-2, 137*27mm	개소	0	232	증)232
접착식 시선유도봉	250*80*750mm	개소	0	12	증)12
교통정리원	야간	인	0	15	증)15
표면보수	Mcrete	㎡	1,339.2	1,308	감)31.2
트럭탑제형크레인	5ton	hr	144	0	감)144
작업용 리프트	주간	개월	0	2	증)2
가림막휀스설치 및 해체	주간	m	0	251	증)251
▣관급자재
개질아스콘	WC-6	TON	809	965	증)156
▣폐기물
폐아스콘		TON	793	983	증)190
폐콘크리트		TON	0	5.61	증)6

공사비 변경 내역(증·감)                          (단위 : 원)

구분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증·감
총공사비		748,020,400	766,500,000	증)18,479,600
도급비	공급가액	574,156,728	588,100,000	증)13,943,272
	부 가 가 치 세	57,415,672	58,810,000	증) 1,394,328
	계	631,572,400	646,910,000	증)15,337,600
관 급 비		87,025,900	92,310,000	증) 5,284,100
이 전 비		29,422,100	27,280,000	감) 2,142,100

Ⅲ		검토결과 및 향후계획

검토결과

○ 서울시 시설관리공단으로부터 제출된 설계변경 보고 사항에 대하여 내용

검토한바 관련근거(작업지시, 실정보고)에 따라 반영되었기에 설계변경

시행코자 하며,

○ 설계변경 및 변경계약 이후 시설관리공단에 준공검사 실시토록 통보 코자 함.

향후계획

○ 2017. 11. 13 : 변경계약

○ 2017. 11. 16 : 공사준공

○ 2017. 11. 23 : 준공검사

따로붙임  1. 시설관리공단 관련 문서 일체 1부.

2. 설계내역서 등 각 1부.  끝.