투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경 시행 (공사명 : 도림천복개(좌안) 보수공사)

우리 사업소에서 2017년 예산사업으로 추진한 『도림천복개(좌안)보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 도림천복개(좌안) 보수공사

나. 공사개요 : 교면포장 67.5a, 교면방수 6,750㎡, 표면보수 1,339㎡

다. 공사기간 : 2017. 6. 20 ~ 11. 16

라. 계약금액 : 631,572,400원

마. 도 급 자 : 정민바우텍(주) 대표 차 정 훈

바. 공사비 변경내역                                       (단위 : 원)

구분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증·감
총공사비		748,020,400	766,500,000	증)18,479,600
도급비	공급가액	574,156,728	588,100,000	증)13,943,272
	부 가 가 치 세	57,415,672	58,810,000	증) 1,394,328
	계	631,572,400	646,910,000	증)15,337,600
관 급 비		87,025,900	92,310,000	증) 5,284,100
이 전 비		29,422,100	27,280,000	감) 2,142,100

사. 설계변경사유: 신규공종 및 물량 증·감에 따른 계약내역 변경

아. 예산과목: 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 도림천복개(좌안)보수,

시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임  1. 설계서갑지 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경 도면 1부.

4. 관련문서(공단) 1부.

5. 제비율검증서 1부.

6. 합의각서 1부.

7. 설계변경(정산) 방침서 1부.  끝.

	시설보수과장
★주무관	김규춘		시설보수과장	전결 11/10 代유태용
협조자
시행	시설보수과-9509	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)