문서번호	여의도공원관리사무소-4899
결재일자	2017.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장	서부공원녹지사업소장
김은희	고정곤	정일환	11/10 김종근
협 조

여의도공원 산책로정비공사

실정보고(1회)승인요청사항 검토

2017.   11.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 산책로정비공사

실정보고(1회)검토보고

여의도공원 산책로정비공사 추진 관련 공사감독위탁기관인 서울시설공단 실정보고(1회) 승인요청사항에 대해 검토내용을 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 여의도공원 산책로정비공사

○ 위    치 : 산책로, 농구장

○ 기    간 : ’17. 10. 20. ~ 12. 18.

○ 내     용 : 탄성포장재 철거 등

○ 계약금액 : 금118,482,400원

○ 계 약 자 : ㈜세웅씨에스 대표 최여송

□ 실정보고 검토

○ 관련근거 : 서울시설공단 공사감독3처-10106(2017.11.03.)

○ 실정보고사항

구 분	보고사항	검토내용	비고
철 거 및 시설물	▹현장여건에 맞게 철거 세부공종을 반영하고 시설물은 공종 및 물량 조정 - 아스팔트 포장절단(산책1차로) 0 → 5,000m - 콘크리트면 절삭(B0.6, T1㎝) 0 → 6.08a - 포장경계석철거(100*100) 102m → 0 - 포장경계석설치(100*100) 102m → 0	▹산책로 우레탄포장 기층 철거 시 아스팔트포장 절단 타당 - 아스팔트 포장절단(산책1차로) 0 → 5,000m ▹농구장 우레탄포장 철거후 콘크리트기층에 심한 요철 발생으로 면 절삭 타당 및 농구장 포장경계석은 상태 양호로 공기 등을 감안 미 철거 타당 - 콘크리트면 절삭(B0.6, T1㎝) 0 → 6.08a - 포장경계석철거(100*100) 102m → 0 - 포장경계석설치(100*100) 102m → 0
부대공	▹공사안내간판을 내역에 반영하여 이용객 통제 및 안전 도모 - 공사안내간판(900*1800) 0 → 2개소	▹산책로 통제가 불가피하므로 이용객 안전을 위한 안내간판 설치 타당 - 공사안내간판(900*1800) 0 → 2개소
관 급 자 재	▹ 상기 포장경계석설치 공종제외로 관급조정 - 화강석경계석(100*100) 105개 → 0 (조달수수료 포함)	▹ 도급자 관급자재 물량 조정 - 화강석경계석(100*100) 105개 → 0(조달수수료 포함)

□ 변경금액(개략공사비)

구 분	금 액(천원)			비고
	당 초	변 경	증 감
총공사비	585,359	601,615	16,256
공급가액	107,711	123,101	15,390
부가세	10,771	12,310	1,539
도급비계	118,482	135,411	16,929
관급비	466,877	466,204	△ 673

□ 검토의견

○ 서울시설공단 실정보고 사항에 대해 상기와 같이 승인하여 공사를 우선 시행하고 준공 전 설계변경하고자 함.

붙임 : 관련문서 1부.