문서번호	토목부-23567
결재일자	2017.11.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		교량건설과장	토목부장
노순재		박용택	11/10 김영수
협조	주무관		代박경철
	주무관		김동현

교각3 엘리베이터 추가설치 실정보고

(중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 공사)

2017. 11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

교각3 엘리베이터 추가설치 실정보고

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 -

지역주민 및 노원구 요청사항에 따른 노약자 및 장애인의 이용을 위한 하천측(교각3)엘리 베이터 추가 설치계획 보고임

※ 관련근거 : 대콘(초안산) 제17-180호(‘17. 9. 13.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

○ 공사규모 : 보행교량 설치(폭 4.5m, 연장 191m)

○ 도 급 비 : 5,298백만원

○ 공사기간 :′16.4.29 ~ ′18.4.28

○ 시 공 사 : 한양산업개발㈜

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트외 1

Ⅱ		실정보고 내용

○ 엘리베이터 설치 사유

- 지역주민과 노원구 요청사항으로 중랑천변 월계역(P3)측에 장애인

및 노약자를 위한 엘리베이터 추가 설치가 필요함

- 향후 동부간선도로 확장으로 하천에서 월계역 접근동선이 없어짐

- 하계교와 간섭으로 2차원 수리해석을 통하여 서울지방 국토관리청

하천점용 허가 완료

○ 추진경위

- ‘16.5.27: 엘리베이이터 추가설치 요청(노원구 토목과-9204)

- ‘16.7. 4 : 하천점용허가 신청서 제출(토목부-13743)

- ‘17.2.13: 하천점용 허가 및 실시계획 인가(점용허가 1513호)

○ 엘리베이터 현황(2개소→3개소)

당초:2개소

추가:1개소

○ 엘리베이터 설치검토

구 분	내 용	공 사 비
기초형식	▷ 교각3 기초형식 - 연암층에 직접 기초 - 엘리베이터 기초 형식 - 교각3과 동일하게 직접기초로 설계 - 기초하단에서 연암층까지는 Mass Concrete로 처리함이 시공성 및 경제적으로 유리	증) 29,536천원
가 시 설	▷ 교각3 가시설(Sheet Pile) 시공시 엘리베이터 위치까지 확장 설치(시공성 및 경제적으로 유리)	증) 26,286천원
엘리베이터	▷ 1기 추가 설치 자 재 - 관급자재 설치비 – 1기 추가	- 관급자재(1기) 증) 60,154천원 - 설 치 비(1기) 증) 87,497천원

Ⅲ		수량 및 단가검토

○ 변경적용 수량

(단위:천원)
구 분	규 격	단위	당 초		변 경		(증.감)	비 고
			수 량	금 액	수 량	금 액
터파기		m3	442	6,421	633	8,313	1,892
콘크리트타설		m3	28	404	96	1,833	1,429
거푸집		m2	139	2,557	341	12,414	9,857
철근가공및조립		Ton	2.594	2,051	7.849	5,902	3,851
SHEET PILE		본	84	78,166	104	95,966	17,800
엘리베이터 설치		대	2	121,248	3	181,871	60,623
보통시멘트		포대	190	594	193	604	10	사급자재
이형철근		Ton	2.671	1,338	8.085	4,124	2,786	사급자재
강재사용료		Ton	64.981	17,844	79.851	21,978	4,134
레미콘	관급자재비	m3	28	2,032	96	6,686	4,654	관급자재
엘리베이터 구입	관급자재비	대	2	111,000	3	166,500	55,500	관급자재
제 경 비				87,552		128,489	40,937
공 사 비				431,207		634,680	203,473

※ 기존 엘리베이터 단가 적용

○ 공사비 증감 현황

구 분	당 초	변 경	(증.감)
도 급 액	318,175,000	461,494,000	143,319,000
관 급 자 재 비	113,032,000	173,186,000	60,154,000
공 사 비 계	431,207,000	634,680,000	203,473,000

Ⅳ		조치계획

○ 주민 민원 및 노원구 요청에 따라 중랑천변 월계역 측에 엘리베이터 추가

설치하는 건설사업관리단 실정보고 사항을 승인 조치하고 추후 설계변경

소심의 후 내역에 반영코자 함

붙  임 : 1. 건설사업관리단 검토 의견서 1부.

2. 노원구 요청사항 및 하천점용 허가증 1부. 끝.