문서번호	토목부-23534
결재일자	2017.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
권순환	박용택	전결 11/10 김영수

BRT 교통소통대책 자문결과에 따른 교통안전시설물 설치 반영 검토 보고 《천호대로(광나루역) 확장공사》

2017. 11.

도시기반시설본부

(토목부)

BRT 교통소통대책 자문결과에 따른 교통안전시설물 설치 반영 검토 보고

《천호대로(광나루역) 확장공사》

‘천호대로(광나루역) 확장공사’ 중앙버스 전용차로 설치공사와 관련하여 공사중 교통소통대책 자문결과에 따른 교통안전시설물 설치비 반영에 대하여 검토하고 보고 드림

【관련근거】천호수 제2017-413호(2017.11.08.) ‘교통안전시설물설치 반영’

1		사업개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

○ 규    모 :

- 도로확장 : 폭 6→10차로,  연장 900m (지하차로 580m 포함)

-  중앙버스전용차로 설치(L=2,600m)

○ 공사기간 : ’10.10.11 ∼’17.12.31(‘18. 6월까지 연장 예정)

○ 계약금액 : 전체 49,467백만원

○ 시 공 사 : 해동건설㈜, 대보건설(주)

○ 감 리 사 : ㈜ 수성엔지니어링

2		감리단 실정보고

□ 검토사유

○ 관계기관(서울시 교통운영과 및 서울지방경찰청)의 공사중 교통소통대책 자문결과에 따라 교통사고 예방 및 원활한 교통소통을 위하여 교통안전시설물 설치비를 반영하고자 함

○ 추진 경위

- ‘17.10.25 : 교통소통대책 자문회의 최종결과 통보(교통운영과 ⇒ 본부)

- ‘17.11.03 : 공사중 교통안전시설 개선 설치 통보(서울지방경찰청 ⇒ 본부)

□ 검토 내용

○ 교통안전시설물(PE방호벽) 구매량 및 이동설치 검토

▶ PE방호벽 구매량 검토 (대형, L2000xW600xH900)

구 분		단위	계획량	소요량	타 현장유용량	기 보유량	비고
BRT	1구간	m	1,386	925
	2구간	m	854	576
	3구간	m	919	684
본선	6-1-3	m	837	837
계		m	3,996	3,022	620	608

※ 금회 구입량 : 3,022 – 620 – 608 = 1,794m ÷ 2 = 897EA

▶ PE방호벽 이동설치 검토

[단위 : EA]

구 분	1구간	2구간	3구간	본선	합계	비고
BRT	230.5	139.0	427.5	-	797.0
본선	-	-	-	304.0	304.0
계	230.5	139.0	427.5	304.0	1,101.0

- 소요량 3,022m 중 타 현장유용량 및 기 보유량을 제외한 1,794m(897EA)를

금회 신규로 구매하여 중앙버스전용차로설치공사(3개구간) 및 본선 면벽 시공을

위한 교통전환(6-1-3단계)에 이동 설치하여 사용

○ 공사량 증·감 대비표

NO.	공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
7	부대공
	PE방호벽	대형(설치비 포함)	EA	-	897	897
	윙카호스		m	-	3,970	3,970
	차선규제봉	750x200x80㎜	EA	-	151	151
	PE드럼	500x800㎜	EA	-	54	54
	PE방호벽 이동설치		EA	-	1,101	1,101
8	이전비
	안전시설비	교통소통	식	1	-	△1

○ 공사비 증·감 대비표

NO.	구 분	당 초	변 경	증·△감	비 고
7	부대공
	PE방호벽	-	174,860	174,860
	윙카호스	-	5,401	5,401
	차선규제봉	-	4,107	4,107
	PE드럼	-	881	881
	PE방호벽 이동설치	-	10,220	10,220
■	직접공사비	-	195,469	195,469
	간접공사비	-	7,895	7,895
	부가가치세	-	20,336	20,336
■	도 급 액	-	223,700	223,700
8	이전비	100,000	-	△100,000
■	총공사비	100,000	223,700	123,700

○ 단가적용

구 분	주 요 내 용	비고
신규 비목 적용률(%)	○지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준[공사계약 일반조건] 제7절 제1호의 나 “계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우”에 해당하므로 협의율을 적용하고자 함. - 협의율 = {(100 + 72.704) ÷ 2} = 86.352%

3		조치 의견

○ 중앙버스 전용차로 설치공사의 교통소통대책 자문결과에 따라 교통사고 예방 및 원활한 교통소통을 위하여 교통안전시설물 설치비를 반영한 감리단의 검토의견이 적정하다고 판단되므로 승인 조치하고, 향후 설계변경에 반영하고자 함.

붙  임 :관련 공문 및 감리 검토의견서 1 부.  끝.