문서번호	도시철도토목부-14672
결재일자	2017.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
김근수		최진규	11/13 김진팔
협 조
	주무관			최경호
	주무관			조태현

『서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1,2공구)』

예비 준공검사 실시결과 보고

2017. 11.

도시기반시설본부

(도시철도 토목부)

『 서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1,2공구)』

예비 준공검사 실시결과 보고

서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1,2공구) 2차 준공에 대한 준공기한 내 공사완료 가능 여부 및 미진사항을 사전 보완하기 위하여 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1		관련근거

○ 도사철도토목부-13784(‘17.10.25.) 예비준공검사자 지정명령부(1공구)

○ 도사철도토목부-13788(‘17.10.25.) 예비준공검사자 지정명령부(2공구)

○ 철도1부(현장)-250(’17.10.26) 궤도공사 예비준공검사 완료보고(1공구)

○ 동기공-4473(’17.11.02) 예비준공검사(2차공사)수행결과 제출(2공구)

2		공사개요

○ 공사명 : 서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구)

- 위치 : 서울특별시 송파구 잠실동 ~ 강동구 둔촌동

- 규모 : 궤도부설 9.428km, 분기기부설 11틀

- 공사기간 : 2016.09.23. ~ 2017.12.25.

- 공사금액 : 6,516,008,700원(2차 6,016,008,700원)

○ 공사명 : 서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구)

- 위치 : 서울특별시 강동구 둔촌동 ~ 송파구 방이동

- 규모 : 궤도부설 10.084km, 분기기부설 12틀

- 공사기간 : 2016.06.13. ~ 2017.12.22.

- 공사금액 : 6,815,549,700원(2차 4,715,549,700원)

3		예비 준공검사 현황

○ 검사일시 : 2017.10.26.(목)

○ 장    소 : 궤도공사 1,2공구 각 회의실 및 현장

○ 예비 준공검사자 : 도시철도토목부 김찬오, 정삼기

○ 입 회 자

- 궤도공사 1공구(토목 918공구~920공구)

· 건설사업관리기술자 : 책임건설사업관리기술자 조성정

기술지원기술자 홍철기, 박재봉

· 시공사 : 현장대리인 전재주

- 궤도공사 2공구(토목 921공구~923공구)

· 건설사업관리기술자 : 책임건설사업관리기술자 한상민

기술지원기술자 조성대, 최종원

· 시공사 : 현장대리인 박중성

4		공사 추진현황

○ 궤도공사 1공구(918공구~920공구)

- 공 정 율 : 90.95%

- 진행사항 : 궤도부설 9,428km 완료, 분기기부설 11틀 완료

- 잔여공정 : 레일연마, 도상물청소, 제표설치

○ 궤도공사 2공구(921공구~923공구)

- 공 정 율 : 88.62%

- 진행사항 : 궤도부설 10.084km 완료, 분기기부설 12틀 완료

- 잔여공정 : 레일연마, 도상물청소, 제표설치, 비상자재 배치

4		예비 준공검사 결과

○ 예비 준공검사 현 시점에서 궤도공사 1공구 및 2공구 준공물량에 대한 준공일자 이전까지 완공이 가능할 것으로 판단되며,

○ 잔여공정 추진에 철저를 기하고, 설계변경 사항에 대한 변경도면 작성 등 관계서류 준비 및 마무리에 철저한 준비가 필요함

5		향 후 계 획

○ ‘17.11 : 설계변경 자문위원회 개최

○ ‘17.11 : 레일연마, 제표설치, 물청소 등

○ ‘17.12 : 비상자재 배치 및 공사 준공

붙임 : 예비 준공검사 완료 보고서 각 1부.  끝.