문서번호	급수운영과-25843
결재일자	2017.11.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
이상현		유명수	11/13 유용일
협 조

공사 실정보고서 검토 보고

(한남테니스장~동국대입구역 송배수관 정비공사)

2017. 11.

중부수도사업소

(급수운영과)

공사 실정보고서 검토 보고

「한남테니스장~동국대입구역 송배수관 정비공사」 감독부서인 서울시설공단에서 공사구간 포장두께 관련 실정 보고를 하여 이를 검토하고 보고드림

Ⅰ		공사 현황

○ 공 사 명 : 한남테니스장~동국대입구역 송배수관 정비공사

○ 공사개요 : D=200~700mm, L=1,735m

○ 도 급 액 : *********

○ 공사기간 : 2017.05.22. ~ 12.27.

○ 도 급 자 : **************

Ⅱ		보고 사항

ᷯ 일부구간 포장두께 실측값 반영

○ 당초설계 : A-1 도로로 t=0.2m로 설계

○ 현장확인 결과 일부구간의 포장두께가 t=0.4m로 실측

○ 구간별 실측한 포장두께를 적용하여 포장깨기및 폐기물 처리량을 변경함이 적정하다고 판단됨

○ 주요 수량 변동 및 개량공사비 변동

공 종	단위	수 량			개량공사비
		당 초	변 경	증·감
A-포장깨기	㎥	50	100	증) 50	감)2,160천원

Ⅲ		검토 의견

○ 일부구간에서 당초 설계와 포장두께가 상이한 사항으로 포장두께 변경을 승인․통보하고자 하며, 변경된 사항을 설계변경시 반영하고자 함

붙임 : 공단 실정보고서 관련서류 1부.