문서번호	시설보수과-9586
결재일자	2017.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	11/13 김용제
협조

- 2017년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)-

추가 보수물량에 대한 조치계획

2017. 11.

강서도로사업소

(시설보수과)

2017년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)

추가 보수물량에 대한 조치계획

우리 사업소에서 추진중인「2017년 도로시설물 일상유지보수공사」와 관련, 추가예산 배정액 및 낙찰차액, 이설비 등을 활용하여 추가 시공에 대한 전반적인 조치계획 보고임.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)

○ 공사규모

- 포장보수 65a, 교면방수 1,400㎡, 신축이음보수공 180m,

- 상판보수공 150㎡, 콘크리트 보수공 1,470㎡, 기타보수 1식

○ 공사기간 : 2017. 4. 27 ~ 2017. 12. 31

○ 도 급 자 : ㈜서영씨앤씨 대표 박성훈

○ 총공사비 : 1,031,867천원

(도급비:769,167천원, 관급비:54,567천원, 이전비:208,133천원)

	< 예산현황 >
▷예산배정: 1,144,000천원(도급비 881,300, 관급비 54,567, 이전비 208,133) ▷계약금액: 1,031,867천원(도급비 769,167, 관급비 54,567, 이전비 208,133) ▷추가배정: 243,000천원 ▷낙찰차액: 112,132천원 ▷변경금액: 1,387,000천원(도급비 1,124,300, 관급비 54,567, 이전비 208,133)

Ⅱ		공사추진현황

○ 작업 추진현황

작업지시	작 업 기 간	작 업 내 용	금액(천원)	비고
1차	2017.5.16~7.31	외발산지하차도 외 11개소 집수정 및 배수로 준설	52,008	완료
2차	2017.6. 1~7.14	궁동터널 외 10개소 시설물 보수	135,520	완료
3차	2017.6.15~6.30	등촌지하차도 외 2개소 단면보수 등	3,696	완료
4차	2017.7.14~8.31	여의2지하차도 단면보수 등	72,534	완료
5차	2017.8. 8~9. 4	외발산지하차도 외 3개소 유도배수로 설치	13,728	완료
6차	2017.8.14~10.31	도림천복개(좌안) 단면보수	98,450	완료
7차	2017.8.18~9.30	노들길지하차도 신축이음보수	59,059	완료
8차	2017.10.27~11.30	가마산지하보차도 외 5개소 빗금도색 등	39,523	진행중
9차	2017.9.01~10.31	도림천복개(좌안) 재포장	201,850	진행중
합계			676,368

○ 계약금액의 88%가 집행(진행작업 포함)된 상태로 현재 집행     잔액은 약 92백만원임.

Ⅲ		보고내용

○ 현재 계약금액의 88%가 집행된 상태이나, 아래와 같은 추가공사가 시급한 보수대상 물량에 대하여 보고후 조치코자 함

1) 노들길지하차도 등 중앙분리대 차광망 설치 (소요금액 74백만원)

☞ 노들길 등 야간 차량통행시 안전사고 위험 상존

2) 화곡터널내 보행로 정비 (소요금액 106백만원)

☞ 노약자 및 이용시민 통행편의 제공 ⇒ 2017년 도로시설물 혁신과제

3) 가마산지하보차도 고드름 방지 대책 유도배수관(열선포함) 설치 (소요금액 60백만원)

☞ 기 설치된 유도배수관 제기능 못해 겨울철 고드름 발생

4) 염창IC하부복개 단면 및 표면보수 (소요금액 60백만원)

☞ 복개구조물 하부 열화등 보수  ⇒ ‘17년 자체정밀점검 및 안전감사시 지적

5) 가마산고가 등 점검통로(B TYPE) 설치 (소요금액 196백만원)

☞ 점검통로 미설치에 따른 안전점검 소홀 등 안전감사시 지적

☞ 도로시설물 일상유지보수(교량 등) 예산이 다 소진되어 본 예산으로 정비

6) 건설폐기물 처리, 개질아스팔트 및 충격흡수시설 구매 등 사용

(소요금액 130백만원)

7) 기타 민원사항 및 시급사항 보수 (소요금액 21백만원)

총 소요금액 : 647백만원

○ 보수대상 현황사진

1) 노들길 중앙분리대 차광막 설치	2) 화곡터널내 보행로 환경개선

3) 가마산지하보차도 고드름방지 유도 배수관 정비	4) 염창IC하부복개 표면보수 정비

5) 가마산고가 점검통로 미설치

○ 상기 보고내용과 같이 추가 보수가 필요한 물량 시공을 위해서는 약 647백만원이 필요하나 현재 집행잔액은 약 92백만원인 바, 555백만원이 부족한 실정임

Ⅳ		조치의견

○ 추가보수에 따른 부족예산 확보방안

- 교량안전과 추가예산 배정금액 반영 : 243,000천원

- 본공사 낙찰차액 반영 : 112,132천원

- 이전비 잔액 반영 : 200,000천원

- 계 : 555,132천원

○ 추가 보수가 필요한 물량에 대하여는 동절기 이전 작업이 완료

되도록 우선 작업지시후 시행하고 추후 설계변경시 정산처리코자 함.

끝.