문서번호	도로보수과-12015
결재일자	2017.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		김권일	11/13 김용제
협조
	관리단속과장		이희천

준공기한 연기 검토보고

【2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11

강서도로사업소

(도로보수과)

준공기한 연기 검토보고

교통안전사고 예방을 위해 시행중인 『2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사』준공기한 연기에 대해 보고드림.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2017. 3. 15. ~ 2017. 12. 15.

○ 시공업체 : (주)지아이엘건설  대표 김용이

○ 도 급 비 : 884,334,000원

□ 보고내용

○ 공사기간 연장 사유 보고

- 시책사업(교통사고 잦은곳 개선사업, 도로교통소통개선사업, 횡단보도 확충정비사업 등)중 관할구청(토목)과 기전과 신호등 설치사업 등 일정 협의 및 공사지연

※ 영등포구 영등포 교차로, 강서구 외발산 사거리·농수산식품공사, 양천구 목동오거리 사업

- “2017년 자전거도로 유지보수 2단계 사업” 또한 시설물 및 포장공사가 포함되어 있어 노면표시 공사는 12월 초에 가능

- “포장도로 굴착복구공사(연간단가)” 작업지시(9차), “포장도로 긴급복구공사(연간단가)” 작업지시(5차) 공사기간이 11월 30일까지 이고,

- 기전과 “2017년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)” 작업지시 4,5차 공사기간은 12월 15일까지로 되어 있음.

□ 검토의견

○ 시책사업의 시행(관할구청, 기전과), 자전거도로 유지보수 2단계 사업, 도로사업소 도로보수과·기전과 연간단가 등 공사완료 후,

○ 노면작업 시행이 가능함에 따라, 사업별 공사완료 시기가 12월 초~중순에 가능하여 절대공기가 부족한 실정이므로 준공기한 연기 조치가 필요하다고 판단 됨.

□ 조치의견

○ 상기 보고 및 검토의견과 같이 절대공기가 부족한 실정으로 준공기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

○ 공사기간 변경(준공기한 연기)

- 당 초 : 2017. 3. 15. ~ 2017. 12. 15.

- 변 경 : 2017. 3. 15. ~ 2017. 12. 29.

○ 지체상금 부과여부 : 미 부과

□ 향후계획

○ 2017. 11.       : 준공기한 연기 요청(관리단속과) 및 작업지시 기간 연장(8차, 10차)

○ 2017. 11.~12. : 공사 및 정산(결과보고) 시행

○ 2017. 12. 29.   : 공사준공

붙임  1. 준공기한 의뢰서 1부.

2. 사업 방침서 및 작업지시 각 1부.  끝.