＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	동부수도사업소
수신	부민통신(주) 대표자 박창욱 귀하(강서구 공항대로 535, 3층 염창동, 대림자동차빌딩)
(경유)
제목	2017년 상수도관 전기방식공사 준공기한 연기에 따른 합의서 송부

1. 시설관리과-31454(2017. 11. 13.)호와 관련입니다.

2. 2017년 상수도관 전기방식공사 준공기한 연기에 따른 합의서를 아래와 송부하오니 2017. 11. 15.까지 합의서에 직인을 날인하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2017년 상수도관 전기방식공사

나. 준공기한

- 당    초 : 2017. 6. 22. ~ 2017. 11. 18.

- 변    경 : 2017. 6. 22. ~ 2017. 11. 24.

****************************************************************************************

붙  임 : 합의서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	채규성		기전팀장	정인주		시설관리과장	11/13 최명익
협조자
시행	시설관리과-31457	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	02-3146-2814	/전송	02-3146-2839	/	cgs8990@seoul.go.kr	/	부분공개(5)