문서번호	도로보수과-6485
결재일자	2017.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
조재민		김준섭	11/13 이덕기
협조
	주무관		한수영

불량맨홀 정비대상(5차) 협의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11

남부도로사업소

도로보수과

불량맨홀 정비대상(5차) 협의결과 보고

우리사업소 관내 불량맨홀 5차분 정비대상에 대하여 맨홀관리기관과 정비 주체 협의 후 그 결과를 보고함.

□ 불량맨홀 현황(5차)

○ 정비대상 : 돌출, 침하, 맨홀단차(뚜껑면과 도로포장면 10mm이상), 맨홀주변 포장불량

구분	계	하수도	상수도	통신	기타
계	232	74	97	46	15

□ 협의결과

○ 협의기관 : 영등포구청(안전치수과)외 18개 맨홀관리기관

○ 결    과 : 203개소(맨홀관리기관 정비 : 29개소)

구 분	계	도로관리청 정 비	맨홀관리기관 정 비	기타
수 량	232	203	29	-

- 영등포구청, KT 동작지사는 자체정비, 동작·금천 소방서는 맨홀 상태가 양호하여 지속적인 관찰, 남부수도사업소 급수운영과는 하자 기간내 맨홀로 하자처리

□ 조치 계획

○ 정비물량(203개소) 대해 「‘17년 특별시도상 불량맨홀 정비공사(연간단가)」계약자 ㈜태평림건설(대표 이동균)에 5차 작업지시(기간:’17.11.13~12.08)코자 하며,

○ 맨홀정비를 주간으로 작업지시 하였으나, 공사신고시 경찰서 협의를 거쳐 야간으로 변경시 부족예산에 대해서는 낙찰차액을 사용코자함.

※ 예산현황

총예산	1,2차 기성	잔여예산	작업지시
			주간	야간
530,818,500	386,624,700	144,193,800	144,000,000	200,000,000

○ 자체 정비시행 예정 기관에 대하여는 11월까지 시행후 정비실적 결과통보토록 안내하고 미이행시 우리사업소에서 정비시행.

○ 노후맨홀(맨홀받침포함)교체가 수반되는 47개소는 맨홀관리기관과 자재수급 관련 사전 협의를 통해 일정에 차질을 빚지 않도록 추진.

붙 임 : 불량맨홀 정비 협의결과 리스트 1부.  끝.