문서번호	도시철도설비부-13603
결재일자	2017.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
이재돈	강치석	구자훈	형태경		11/13 代류훈
협 조	교통정책과장			구종원
	건설총괄부장			이상국
	도시철도토목부장			代윤방식

9호선 3단계 구간 종합시운전 계획 보고

2017. 11.

서울시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

9호선 3단계 구간 종합 시운전 계획

2018년 10월 지하철 9호선 3단계 구간을 차질없이 개통하고자

열차 종합시운전 계획과 시운전 안전관리 계획을 수립 시행코자 함.

Ⅰ. 3단계  건설개요

○ 위    치 : 종합운동장 ~ 올림픽공원 ~ 보훈병원

○ 규    모 : 총연장 9.14㎞, 정거장  8개소(환승역 2개소)

○ 사업기간 : 2009.12. ~ 2018.12.

○ 개통예정일 : 2018. 10월중(개통일 미정)

○ 노 선 도

※ 9호선 건설현황

구 분	1단계	2단계	3단계
구 간	개화역 ~ 신논현역	신논현역 ~ 종합운동장	종합운동장 ~ 보훈병원
정거장수	25개소	5개소	8개소
연 장	25.5km	4.5km	9.14km

Ⅱ. 종합시운전 시행 계획

□ 시행일정

○ 시행기간 : ‘17.12.1(열차본선투입일) ～ 3단계구간 개통일까지

○ 시험주관 : 시운전 TF팀

□ 관련근거

○ 철도안전법 제38조(종합시험운행) 및 동법 시행규칙 제75조(시기,절차 등)

○ 철도종합시험운행 시행지침(국토부고시 제2017-149호)

□ 시행지침 주요내용

○ 단계별 시행 : 공종별시험→사전점검→시설물검증시험→영업시운전

○ 안전관리계획 수립 : 종합시험운행 전 시행

○ 종합시험운행 계획 및 시험운행 결과보고 : 국토교통부

① 공종별시험 (제8조)				분야별 시설물 시공후 시공품질 및 안전성 확인 개별시험 : 자체적으로 시행
⇩			⇦	안전관리계획 수립(제5조) : 사점점검, 종합시험 포함
②사전점검 (제9조)				종합시험운행전 시험열차 안전확보 운행구간의 시설물 기능시험결과 등 관련서류 검토 분야별 현장시설물 안전점검 ※ 철도운영자와 합동으로 시행 ※ 종합시험운행 가능여부 판단
		⇩	⇦	종합시험운행계획 수립 : 국토교통부 제출(시험실시 1개월 전) ※ 공종별 시험결과, 사전 점검결과 포함
③ 종 합 시 험 운 행		시설물검증시험 제13조, 별표 2		허용 최고속도까지 열차 증속 운행 철도시설물의 안전상태, 차량운행 적합성 철도시설물과의 연계성(Interface) 철도시설물의 정상작동 여부 등 확인․점검
		⇩
		영업시운전(운영사) 제14조, 별표 3		시설물 검증시험 완료후 영업개시 대비 열차 운행계획에 의한 실제 영업상태 가정 시설물에 대한 종합적인 연계성, 안전성 종사자 업무숙달 등 점검
			⇦	종합시험운행결과 작성 : 국토교통부 제출

□ 시행 세부내용

1		공종별시험

⇒ 전동차 투입전 시험, 투입후 시험으로 구분 시행

시험항목		시험내용	시행기한	주 관
전동차투입전	궤도부설 및 검측	궤도부설 및 허용오차 검사	‘17. 9.30.	토목부
	건축한계측정	열차 투입전 건축한계 저촉여부 확인	‘17.11.24.	토목부
	신호연동시험	신호기, 전철기등의 정상동작여부 확인	‘17.11.30.	설비부
	열차무선시험	차량운행 통신수단 확인시험	‘17.11.30.
	전차선 가압시험	전차선 누설전류 및 사용전압 인가시험	‘17.11.30.
전동차투입후	전차선 집전시험	차량투입후 전차선과 전동차 집전성능 확인	‘17.12. 1.	설비부
	PSD 연동시험	전동차 출입문과 연동 동작상태 시험	‘18. 3.31
	전력원격제어시험	원격에 의한 전력제어 및 감시확인	‘18. 4.30
	신호 종합시험	자동․무인운행을 위한 인터페이스 확인	‘17.12. 1. ～ ‘18. 5.30.

※ 각 분야별 상세 시험계획 : 별도수립 시행

2		사전점검

⇒ 종합시험운행전 시험열차에 대한 안전을 확보하기 위한 점검

주요항목	점검내용	시행기한	주 관
운행구간의 시설물 기능시험 시험결과 등 관련서류 검토	∙ 분야별 시험결과 등 서류검토 → 검토결과 시운전 TF팀에 통보	‘18. 5. 1 ~ ’18. 5.15.	설비부
분야별 현장시설물 안전점검	∙ 분야별로 현장 안전점검 시행 → 점검결과 시운전 TF팀에 통보

※ 각 분야별 상세 점검계획 : 별도수립 시행

3		종합시험운행

시험항목	점검내용	시행기한	주 관
시 설 물 검증시험	허용 최고속도까지 열차 증속 운행 철도시설물의 안전상태, 차량운행 적합성 철도시설물과의 연계성시험(Interface) 철도시설물 정상 작동여부 등 확인 점검	‘18. 6. 1 ~ ’18. 6.30.	설비부 (시운전팀)
영업 시운전	실제 영업상태를 가정하여 열차 운행 점검 → 시설물의 종합적인 연계성, 안전성 점검 → 영업개시 대비 종사자의 업무숙달 등	‘18. 7. 1 ~ ’18. 9.30	운영사

Ⅲ. 시운전 TF팀 운영계획

□ TF팀 운영계획

○ TF 구성 : 본부, 9호선 운영사, 시스템 감리단, 시공사, 주요장치 공급사

○ 운영기간 : ‘17.12.1 ~ 3단계구간 개통일까지

○ 근무장소 : 올림픽공원역사내(지하1층)

○ 근무시간 : 평일 07:00 ~ 21:00(탄력적으로 조정시행 예정)

○ 근무인원 : 상황반 5명(본부, 운영사), 지원반 2명(시스템 감리단장 외)

□ 조직구성 및 주요임무

		시운전 TF팀장 ( 도시철도설비부장 )
						차량과장
시운전 상황반 ( 5명 ) (반장 : 도시철도설비부 과장)					지원반 ( 2명 ) (반장 : 시스템감리단장)
∙ 본부 : 4명(차량과 2명 상시 근무) → 도철설비부 4명 ∙ 9호선 운영사 : 1명(필요시 근무하며, 특히 사전점검(2018. 5. 1.)부터 필히 근무)					∙ 토목공구 감리원 : 1명 ∙ 시공사, 주요장치 공급사(필요시 근무) → 비상 연락체계 상시 유지
< 주요임무 > ∙ 시운전 상황유지(추진사항 일일보고) ∙ 본선터널 등 열차 시운전 안전관리 ∙ 시운전 관계자 회의 개최(주관) ∙ 열차 운행계획(관계자 협의) ∙ 전력 급전, 단전 통제 ∙ 터널내 작업자 통제 ∙ 분야간 인터페이스 조정(부조화 방지) ∙ 현안사항 발생시 조정업무 등					< 주요임무 > ∙ 시스템 공구 및 본선 안전관리 ∙ 시운전 장애사항 및 긴급사항 대처 (관계자 연락 및 조치결과 보고) ∙ TF 상황반 업무지원 등

□ TF팀 운영비

○ 예    산 : 2,532백만원

○ 지출내역 : - 임     차(사무실, 책상, 의자, 서류보관 캐비넷, 팩스 등)

- 공공요금 납부(전기, 전화, 인터넷, 냉․난방 전력비)

○ 지출방법 : 품의서에 의거 지출

○ 예산과목 : 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도 9호선 3단계 건설,

시설비및부대비, 시설비(시운전비)

Ⅳ. 시운전 안전관리 계획

⇒ 세부 시행계획 : 별첨1 (열차시운전 안전관리 계획)

□ 시운전 열차 안전관리

○ 1,2단계 영업구간

- 통제책임 : 9호선 운영사(개화차량기지 종합관제실)의 통제하에 실시

- 열차운행 : 운영사 운전․운영계획과 관제실 통제에 따름

○ 3단계 건설구간

- 통제책임 : 본부 시운전 TF팀(현장 상황반)의 통제하에 실시

- 열차운행 : 시운전 TF팀의 시운전 일정계획에 따름

□ 본선 운행구간 안전관리

○ 일일 안전점검

- 점검시기 : 열차 투입전(08:00 이전)

- 점검방법 : 본선터널 전구간 열차 운행에 지장없게 현장 안정성 확인

- 점검책임 : 공구별 안전관리자

- 점검결과 : 안전관리자는 시운전 TF팀에 점검결과 보고(08:30)

→ 결과 보고는 팩스 또는 SNS(밴드 등) 이용

○ 주요 점검항목

- 본선 터널내 야간 작업자 철수여부 확인

- 선로내 작업잔재 반출 여부 등 열차 안전운행 장애물 확인

- 터널 개구부 폐쇄여부, 안전망 설치상태, 승강장 안전문(PSD) 닫힘상태

- 정거장 안전관리원 고정 배치 확인

※ 안전관리원 : 열차 운행시간중 터널내 무단출입자 통제(인명사고 예방)

○ 야간 및 공휴일 작업

- 시운전 TF팀(상황반)에 사전 보고하여 승인을 득한 후 작업 시행

□ 전력 급․단전 안전관리

○ 통제책임 : 시운전 TF팀 → 현장 상황반에서 급․단전 통제

○ 급전관리 : 본선구간 열차운행에 지장없음을 확인 후 변전소에 급전 요청

○ 단전관리 : 시운전 종료 후 열차가 영업구간으로 이동후 단전 요청

Ⅴ. 행정사항

□ 분야별 협조사항

○ 공종별 개별시험 계획 수립 : 분야별 시행 세부계획과 시행결과를                                   시운전 TF팀에 통보

※ 시행근거 : 철도종합시험운행지침 제8조(공종별시험)

○ 정거장(승강장) 안전관리원 고정 배치 : 각 공구별 시공사

○ 본선터널 물청소 등 청소관리 : 시운전 열차 본선구간 운행 전 실시

※ 특히, 영업구간으로 비산먼지가 유입되지 않도록 관리(민원 예방)

○ 출입문 시건장치 설치․관리 : 터널 환기실 출입문, 비상출입문 등

○ 본선 송풍기 가동 : 터널 비산먼지 운영구간 유입 방지

○ 시운전 현장 TF팀 근무자 협조 : 도시철도설비부 등

○ 도시교통본부, 서울메트로9호선운영(주), 서울9호선운영(주)

- 시운전 열차 투입 및 시험 협조, 시운전 TF팀 근무자 1명 지원

□ 행정사항

○ 시운전 TF팀 현장 근무자는 매주 단위 상시 출장명령 및 정위치 근무

○ 휴일 또는 심야 근무시 대체 휴무 시행

○ 현장 TF팀 상황반 관리운영비 지출

○ 1~2단계 운영사 및 검수설비 유지관리업체의 시운전 참여에 따른     제반  비용 지급(별도 협의 시행)

→ 승무원 인건비, 전력비, 전동차 정비 및 청소비용 등

Ⅵ. 향후계획

○ ‘17.12. 1 : 3단계 구간 최초 열차 투입

○ ‘18. 3. : 종합시험운행 시행계획 수립 및 통보(국토교통부, 교통안전공단)

○ ‘18. 5. : 사전점검 실시

○ ‘18. 6. : 시설물 검증시험

○ ‘18. 7. ~ ‘18. 9. : 영업시운전 실시

○ ‘18.10. : 개통 예정

첨 부   1. 종합 시운전 안전관리 계획 1부.

2. 9호선 3단계 종합 시운전 추진일정 1부.  끝