문서번호	시설관리과-23208
결재일자	2017.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
이무규	문용욱	고신석		11/13 이인걸
협 조

등촌초등학교외 41개소

아리수음수대 전기공사 설계변경 계획

2017. 11.

강서수도사엄소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

등촌초등학교외 41개소

아리수음수대 전기공사 설계변경 계획

아리수 음수대에 전기공급을 위하여 시행한 『등촌초등학교외 41개소 아리수 음수대  전기공사』 의 물량 증감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경 계획을 보고 드림

□ 사업개요

○ 건    명 : 등촌초등학교외 41개소 아리수 음수대 전기공사

○ 사업기간 : 2017. 7. 20. ～ 11. 16.

○ 총부기계약금액 : ************

○ 계약상대자 : **********

○ 사업내용 : 아리수 음수대에 전기공급

□ 설계변경

○ 설계변경 사유

- 접지선 추가 등 공종추가 및 공종변경[시설관리과-18038(2017.9.1.)]

- 시공물량 조사결과 물량 증감발생 : 따로붙임

- 설치대상 변경 : 42개소⇒28개소[시설관리과-22616(2017.11.6.)]

- 본부 계약심사 이행실태 순회점검 지적 : 콘트롤BOX 설치 노임적용 변경

○ 설계변경 내용

- 계약기간 : 변경없음

- 총부기계약금액

구분	변 경 전	변 경 후	증 ․ 감 액
공 급 가 액	39,530,202	37,554,546	감1,975,656
부 가 세	3,953,020	3,755,455	감197,565
계	43,483,222	41,310,000	감2,173,222

- 물량 변경(상세내역 별첨)

구 분	공 종	비 고
물량 변경	-1종금속제가요전선관 설치 등 10종 감소 -경질비닐전선관 설치 등 2종 증가
신규 공종	-난연관CD설치 등 10종
본부 점검 지적사항 조치	-플라스틱콘트롤BOX 공종(내선전공 0.66인)을 PVC 노출박스 공종(내선전공 0.2인)으로 변경

□ 조치의견

○ 상기와 같이 작업시행 중 발생한 시공물량 변경, 신규 추가물량 발생에 따른 변경사항에 대하여 설계변경심의위원회를 개최하고자 하며,

○ 심의결과를 반영하여 설계변경 시행 하고자 함.

붙임: 1. 설계변경 내역서 1부

2. 물량변경 및 신규물량 현황 1부

3. 관련공문 1부

4. 제경비 검증확인서 1부.  끝.