문서번호	토목부-23613
결재일자	2017.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권순환		박용택	11/13 김영수
협 조
	기획예산과장			안순봉

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

중앙버스 전용차로(BRT) 공사관련 자문회의 개최

2017. 11.

도시기반시설본부

(토목부)

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

중앙버스 전용차로(BRT) 공사관련 자문회의 개최

‘천호대로(광나루역) 확장공사’ 중앙버스 전용차로 설치공사와 관련하여 포장시공 및 정거장 소성변형 방지를 위한 패널 설치에 대하여 전문가 및 관계자 자문회의를 개최하여 검토하고자 함.

1		사업개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

○ 규    모 :

- 도로확장 : 폭 6 → 10차로,  연장 900m(지하차로 580m 포함)

- 중앙버스 전용차로 설치 : 연장 2,800m, 버스정류소 5개소

○ 공사기간 : ’10.10.11 ∼’17.12.31(‘18. 6.30 연장 예정)

○ 계약금액 : 전체 49,467백만원

○ 시 공 사 : 해동건설㈜ 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜ 수성엔지니어링

2		자문회의 안건

□ 아스콘 포장 시공방법 검토

○ 아차산 사거리 구간은 현재의 아스콘 두께 및 상태를 감안하여 기존 포장 활용 및 당초  ‘절삭후 덧씌우기’ 에서 ‘덧씌우기’ 공법으로 변경하는 방안 검토

○ 광나루역 사거리 일반차로 구간은 포장상태가 비교적 양호하므로 공사구간에서 제외하는 방안 검토

□ 버스 정류장 PC패널 설치 검토

○ 버스 정류장 구간은 차량 정차, 출발로 소성변형이 많이 발생하므로 품질확보를 위해 당초 개질 아스콘 포장을 PC패널로 설치하는 방안 검토

3		자문회의 개최

□ 중앙버스 전용차로 포장 및 정류장 PC판넬 검토 자문회의 개최

○ 일시 : ‘17.11.14(화) 10:00 ~ 12:00

○ 장소 : 도시기반시설본부(12층) 토목부 회의실

○ 자문위원 구 : 총 7명 (위원장 1, 위원 6)

구 분	소 속	직위 및 담당분야	성 명
위원장	도시기반시설본부 토목부	부장	김 영 수
위 원	도시기반시설본부 토목부	교량건설과장	박 용 택
위 원	서울시 교통운영과	BRT 팀장	박 동 욱
위 원	서울시 성동도로사업소	도로보수과장	이 상 호
위 원	서울시 건설기술심의위원회	심의위원	한 금 숙
위 원	㈜진우엔지니어링코리아	교통분야 중앙버스 전용차로 기본 및 실시설계 참여자	이 창 열
위 원	㈜수성엔지니어링	도로 및 공항 기술사 (기술지원 건설사업관리기술자)	최 정 식

□ 자문수당 지급

○ 자문수당은 서울시 건설기술심의위원회 위원만 지급

(공무원 및 사업관련 설계, 감리업체 임직원은 제외)

- 자문비용 : 100,000원

- 예산과목 : 도시기반시설관리, 도시기반시설관리, 시설공사 품질향상  유지관리, 일반운영비, 사무관리비

4		향후계획

□  자문회의 결과에 따라 포장 및 정류장 설치공법을 확정하고 금년 12월 개통에 차질이 없도록 사전준비 등 긴급 추진하고 감리단 실정보고 및 설계변경, 계약업무 등을 조속 시행하고자 함