문서번호	시설과-7112
결재일자	2017.11.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관	주무관	시설과장
황인공	이춘한	11/13 오임석
협 조

〈 해양관 전기시설 개보수 공사 〉

설 계 변 경(정산)보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

서울대공원

(시 설 과)

〈 해양관 전기시설 개보수 공사 〉

설 계 변 경(정산) 보 고

『서울대공원 해양관 전기시설 개보수공사』 시행 중 시공 물량증감 및 미사용 보험료 등 설계변경 사항에 대하여 아래와 같이 정산 시행코자 함

1		공 사 개 요

◇ 공 사 명 : 해양관 전기시설 개보수 공사

◇ 공사기간 : 2016.12.08 ~ 2017.11.15

◇ 계약금액 : *********

◇ 공사업체 : ************************

◇ 감리업체 : **********************

◇ 주요공사내용

•  전기실 장비교체(고압차단기, 저압차단기, 발전기)

•  전력간선 및 분전반교체

• 관리실(사무실) 전등.전열 및 기타공사

2		공사비 변경 현황

(단위 : 원)

구 분		금 액(변경전)	금 액(변경후)	증 감	비고
총 공 사 비		금230,680,810원	금230,680,810원	증감없음
도급 비	공급 가액	금209,709,833원	금209,709,828원
	부가가치세	금20,970,983원	금20,970,982원
	계	금230,680,810원	금230,680,810원		원단위 절사

3		공사비 변동 주요내용

(단위 : 원)

구 분	변경전	변경후	증,감	비고
1. 전기실공사	25,371,307	74,908,751	49,537,444
2. 전력간선공사	66,319,369	9,604,170	-56,715,199
3. 동력설비공사	8,256,791	6,543,259	-1,713,532
4. 전열설비공사	9,420,899	9,628,135	207,236
5. 전등설비공사	22,731,118	22,542,518	-188,600
6. 냉난방설비공사	2,725,711	2,725,711	-
7. 소방공사	1,364,926	1,364,926	-
8. 철거공사	19,258,496	18,930,593	-327,903
9. 기타공사		9,204,672	9,204,672
공사비 소계	155,448,617	155,452,735	4,118
경비 등 기타 정산	75,232,193	75,228,075	-4,118	건강,보험료 등 미사용,정산
총 공사비	230,680,810	230,680,810	-

※ 공사감리 실정보고 : 석윤인곡기술사사무소 17-0919-1(`17.09.19), 17-1108-1(`17.11.8)호 별첨

◇ 저압분전반 교체 및 간선케이블 물량 변경정산

◇ 사육사 통로, 조리실 등 등기구 타입 및 수량변경으로 인한 물량정산

◇ 전기실 노후바닥 및 트렌치 카바 추가물량 정산

◇ 저압분전반 및 부하설비 안전진단 점검 지적사항 보수 추가물량 정산

◇ 안전관리비, 건강보험료 등 미사용 부분에 대한 정산

4		조 치 의 견

◇ 상기 변경내용과 같이 설계변경(정산) 시행코자 함.

따로붙임 : 1. 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 시공감리 실정보고서(2,3회) 각 1부.  끝.