문서번호	행정지원과-20141
결재일자	2017.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
행정관리팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
최은봉	박성주	11/14 신대현

청사 환경개선공사 일정변경 및 공사감독 계획

2017. 11.

강동수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	□

청사 환경개선공사 일정변경 및 공사감독 계획

▶ 수도계량기 검침 위탁기관인 서울시설공단 강남수도관리소에서

청사 환경개선공사 일정변경 요청이 있어

▶ 기 계획된 공사일정을 변경 조치하고 공사 적정시공 및 안전시설       설치여부 등 확인‧점검을 위해 공사현장 감독을 실시하고자 함

Ⅰ		공사일정 변경

□ 공사기간 : (당초)11.17∼12. 3 → (변경)11.24∼12. 3

□ 일정변경 요청사유

○ 서울시설공단 강남수도 관리소에서 청사4층 일부공간(97.2㎡)       을 사용중으로 ‘17.11월 요금고지서 분류작업(’17.11.16~20)          예정인 바, 동 기간을 제외하고 환경개선 공사 추진 희망

□ 세부공사 추진일정

위 치	면 적	공사위치	석면제거공사		환경개선공사
			당 초	변 경	당 초	변 경
1층	23.4㎡	서고.휴게실	11.18~19	11.25~26	11.25~26	11.26
3층	32㎡	통신실 가벽			11.26~12.3	12..2~12..3
4층	467㎡	요금과,노조사무실, 검침용역사무실	11.17~18	11.24~25 (야간공사)	11.18~19	11.25~26
	74㎡	가벽(단열재)			11.18~19	11.25~26
옥탑층	11㎡	천 정			11.19~20	12.02~03

Ⅱ		공사 현장감독 계획

□ 사업소와 기 계약된 공사추진 관련 사항(자재,인력,안전시설 설치 등)을

공사업체가 준수할 수 있도록 공사현장 감독 추진

○ 공사 감독자는 붙임 서식을 활용, 일일 공사감독일지를 작성

- 주간(09:00~18:00) : 담당팀장, 담당자 등

- 야간(18:00~공사종료시까지) : 당직책임자, 당직자 등

○ 철야공사가 예정되어 있는 기간(‘17.11.24~25)은  당직책임자가       공사 감독, 출입자 확인 등 역할 수행

□ 행정사항

○ 청사 환경개선 공사 일일 감독 담당자는 붙임 서식을 활용하여

공사 감독일지를 작성, 익일까지 결재를 득하시기 바람.

○ 행정지원과에서는 철야공사가 예정되어 있는 기간의 당직근무자에

대하여 당직근무자 준수 필요사항 및 역할 등에 대한 별도 안내 시행

붙임 : 청사 환경개선공사 일일감독 결과 보고서 1부.  끝.