투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	준공기한 연기 시행(금천구 박미사랑공원 지장물철거공사)

1.  시설과-3820호(2017. 11. 14.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진중인『금천구 박미사랑공원 지장물철거공사』에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 금천구 박미사랑공원 지장물철거공사

나. 용역기간 : 2017. 8. 18. ~ 11. 15.

다. 계약금액 : 금116,209,900원정(금일억일천육백이십만구천구백원)

라. 계약업체 : 강남건영(주) 대표 신승호

마. 연기 준공기한 : 2017. 12. 30.

바. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

사. 지체상금 부과여부 : 미 부과

아. 준공기한 연기사유

○ 진성연립 A동 미이주 1세대 명도소송 및 이주협의가 진행중이며, 명도소송 선고 예정(2017. 11. 23.)에 따른 준공기한 연기가 필요함.

붙임  1. 준공기한 연기 조치 의뢰서

2. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	이석중		주무관	오재영		시설과장	11/14 임병국
협조자
시행	시설과-3822	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60 (성산동) 서부공원녹지사업소	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5554	/전송	02-300-5569	/		/	대시민공개