문서번호	급수운영과-25949
결재일자	2017.11.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
조민성	박장진	11/14 유용일

공사현장실정보고서 검토보고 8차

(한남동 배급수관 정비공사)

2017. 11.

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

1. 제    목 : 공사실정보고서 제출(8차)

(고무매트 부설 및 누락공종 등 신규반영)

2. 관련근거

가. 공사감독2처-13583(2017.11.13.)

3. 공사현황

가. 공 사 명 : ***************************

나. 공사개요 : ********************

******************************************19

************************

***************************

*************************위정훈

4. 보고내용 및 검토의견

연번	구 간	서울특별시시설관리공단 요청내용	사업소 검토의견
1	1,2,4 구간	❍ 1, 2, 4구간의 보도굴착 시공 후 보행자매트 부설 - 본 1, 2, 4구간의 관부설을 보도에 굴착시공으로 설계되어 있으나 당일복구가 되지 않아 도보가 복구 되기전까지 비산먼지 발생민원이 예상됨. ❍ 실시공중 발생한 부설공 누락분 실정보고 - 본 공사를 시행중 발생한 주철(이형관) 부설공종(주철(이형관) 부설공 200mm외 49개 항목) 등 이 누락되어 있음 ※ 검토의견 ❍ 보도구간시공 후 복구전까지 비산먼지 발생저감 및 보행자의 안전을 위하여 고무매트 등을 시공하여 현장을 관리함이 타당함. - 개략공사비 : 증)1,000천원 ❍ 설계에는 누락되어 있지만, 관부설을 위해 꼭필요한 공종이므로 실시공수량을 확인하여 설계변경 시 반영함이 타당함. - 개략공사비 : 증)28,000천원	〇 검토결과 : 타당함. 공정을 추가하고 설계변경 시 사진 및 근거자료를 확보하여 보고토록 조치하고자 함.

5. 조치의견

가. 상기 검토 의견대로 감독업무를 수행하고 있는 서울특별시시설관리공단에 통보하여     시공에 만전을 기하도록 조치코자 하며

나. 위 사항에 대해 *******에게 시행토록하고 비용**************에 대하여는 설계변경     시 반영토록 통보코자 합니다.

별  첨 : 1. 관련공문 1부.

2. 공단 실정 보고서 1부.

3. 현장 실정 보고서 각 1부.  끝.