투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(공원내 토목구조물 보수보강 공사)

1. 시설과-7029(2017.11.14.)호와 관련입니다.

2.『공원내 토목구조물 보수보강 공사』와 관련하여 다음과 같이 준공기한을 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 공원내 토목구조물 보수보강 공사

나. 계약일자 : 2017.09.18

다. 준공기한 : 2017.11.18

라. 도 급 비 : 58,076천원

마. 도 급 자 : ㈜플러시드

바. 준공기한연기

용 역 명	계 약 일	준 공 기 한		비 고
		당 초	변 경
공원내 토목구조물 보수보강 공사	2017.09.18	2017.11.18	2017.11.30

붙임 : 준공기한 연기 검토보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	이상원		시설팀장	유진석		시설과장	11/14 김재균
협조자
시행	시설과-7044	(		)	접수		(		)
우			/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5964	/전송	02-3783-5969	/		/	대시민공개