아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	중곡빗물펌프장 외 3개소 성능개선용역 과업범위 변경 알림

1. 우리시에서 시행중인  “중곡빗물펌프장 외 3개소 성능개선 기본 및 실시설계용역‘과 관련입니다.

2. ‘17. 9. 15(금) 개최한 전문가 자문회의 시, 중곡(광진구), 영등포,신길(영등포구) 펌프장 유역은 펌프장 증설만으로는 근본적인 침수해소가 불가능하고,   펌프장 증설은 하수관거 정비와 연계하여 추진함이 적절하다는 의견이 다수 있었습니다.

3. 이에 하수관거 정비 주관부서와의 협의 후, 펌프장 증설을 하수관거 정비와 연계하기 위하여 부득이 본 설계용역의 과업범위를 아래와 같이 변경함을 알려드리오니, 용역업무 수행에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

가. 과업범위 변경 : 기본 및 실시설계 → 기본설계

나. 변경내용

펌프장명	변 경 전	변 경 후	비 고
중곡, 영등포, 신길	기본 및 실시설계	기본설계
증산	기본 및 실시설계	기본 및 실시설계	변경없음

※ 증산빗물펌프장은 현재 유입관로 통수능 확보가 가능함을 고려하여                   계획대로 기본 및 실시설계 진행

다. 관련근거

○「용역계약일반조건」제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정

○ 과업내용서 제1장 일반사항 14.(과업내용의 변경).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	광진구청장(안전치수과장),영등포구청장(치수과장),은평구청장(치수과장)
전문관	김재웅		치수설비팀장	백성현		하천관리과장	11/14 손경철
협조자
시행	하천관리과-17811	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/
전화	02-2133-3878	/전송	02-2133-1044	/		/	대시민공개