문서번호	도시철도토목부-14786
결재일자	2017.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
김근수		최진규	11/15 김진팔
협 조
	주무관			조태현

『9호선 3단계 궤도공사(1,2공구)』

도유기 수량 변경 실정보고 검토

2017. 11.

도시기반시설본부

(도시철도 토목부)

『 9호선 3단계 궤도공사(1,2공구)』

도유기 수량 변경 실정보고 검토

9호선 3단계 궤도공사(1,2공구) 추진 중 건설사업관리 책임기술자로부터 도유기 수량변경(증·감) 보고가 있어 다음과 같이 검토 함

1		관련근거

○ 도화(궤도) 2017-179(‘17.10.18.) 도유기 수량(감) 변경 실정보고

○ 동명궤감 2017-183(’17.11.06.) 도유기 수량(증) 변경 실정보고

2		공사개요

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1,2공구)

○ 위    치 : 서울특별시 송파구 잠실동 ~ 송파구 방이동

○ 규    모 : 궤도부설(콘크리트도상) 19.56km

분기기부설(RC 침목) 23틀

○ 공사기간 : 2016.06.13. ~ 2017.12.25.

○ 공사금액

-1공구 : 10,661백만원(도급비:6,516백만원, 관급비:4,145백만원)

-2공구 : 11,153백만원(도급비:6,815백만원, 관급비:4,338백만원)

3		현 황

○ 도유기 설치 계획

구 분	공 종	규 격	위 치	계획량	사업비 (천원)
1공구	도유기 설치	디지털 감응식	R=300이하 곡선	4개	30,759
2공구	도유기 설치	디지털 감응식	R=300이하 곡선	3개	22,365

○ 도유기 설치기준(실시설계 보고서)

- 도유기 설치개소 : R ≤ 300m 외측레일에 설치

- 도유거리 : 350m~400m

4		건설사업관리단 검토의견

○ 검토내용(1공구)

- 도유기 설치개소 상선 R=245m 1대, 하선 R=250m 1대로  총 2대를 설치토록 계획되어 있으나,

- 도유기 수량산출 시 4대로 산출 오류(4대→ 2대로 변경)

○ 검토내용(2공구)

- 도유기 설치개소는 상선 R=290m 1대, R=266m 1대, 하선 R=306m1대, R=256m 1대 총 4대 설치토록 계획되어 있으나,

- 도유기 수량산출 시 3대로 산출 오류(3대→ 4대로 변경)

○ 변경계획

구 분	공 종	규 격	당 초 수 량	변 경 수 량	사업비 (천원)
1공구	도유기 설치	디지털 감응식	4대	2대	감15,379
2공구	도유기 설치	디지털 감응식	3대	4대	증 7,455

4		조치의견

○ 상기 검토 내용과 같이 도유기 설치시 필요한 사급자재(도유기) 구매 수량을 건설사업관리단의 검토 의견에 따라 변경 조치코자 하며,

○ 변경되는 사업비에 대해서는 추후 설계변경시 반영 처리하고자 함.

붙임 : 도유기 수량 변경 검토 보고서 각 1부.  끝.